투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시한강사업본부
수신자	총무과장
(경유)
제 목	설계변경 및 준공기한 연기에 따른 계약변경 의뢰

1. 치수과-1817호(2017.5.10)와 관련입니다

2. 『여의샛강 소규모 환경영향평가 용역』에 대하여 아래와 같이 설계변경 및 준공기한 연기에 따른 변경계약을 요청하오니 조치하여 주시기 바랍니다.

가. 용 역 명 : 여의샛강 유지유량확보 사업 소규모 환경영향평가 용역

나. 용역기간 : 2016. 12. 21  ~ 2017. 5. 19

다. 도 급 자 : ㈜ 유신 대표 성낙일

라. 설계변경 사유 : 여의샛강 오염원인 파악을 위한 추가조사

마. 준공기간 연기사유 : 추가조사 기간 및 관련부서 협의기간 반영

바. 설계변경 및 준공기한 연기 내역

구 분	당 초	변 경	비 고
계약금액	69,340,000원	72,617,000원	증 3,277천원
계약기간	‘16. 12. 21 ～ ’17. 5. 19	‘16. 12. 21 ～ ’17. 8. 19	증 3개월

사. 예산과목 : 물순환안전국(하천관리과), 치수 및 하천관리, 하천복원 및 정비,

한강관광자원화사업(국비), 시설비(401-01)

붙 임 : 1. 설계변경 및 준공기한 연기 검토보고(치수과-1817호) 1부.

2. 설계변경 내역서 1부

3. 준공기한 연기의뢰서 및  합의각서 각 1부.   끝.

	치수과장
주무관	권혁제		치수과장	05/11 신용철
협조자	주무관	심옥경		기획예산과장	김건태
시행	치수과-1835	(		)	접수		(		)
우	04770	서울시 성동구 강변북로 257 (성수동1가 642-25)	/
전화	02-3780-0695	/전송	02-3780-0774	/	khjee@seoul.go.kr	/	대시민공개