문서번호	동물보호과-10135
결재일자	2017.6.1.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

				시 민
주무관	동물정책팀장	동물보호과장		시민건강국장
배진선	김문선	전재명		06/01 代박범
협 조

동물복지지원센터 인테리어 공사 계획

2017. 6.

시민건강국

(동물보호과)

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
시민 참여	● 시민 의견 반영 및 사업 참여 방안을 검토하였습니까? 예) 청책토론회, 설문조사, 시민공모 등	■	□	시민참여
전문가 자문	● 관련 전문가 의견을 반영하였습니까? 예) 자문위원회 개최, 타당성 검토, T/F 운영 등	■	□	자문회의
갈 등	● 이해 당사자 간 갈등발생 가능성을 검토하였습니까? 예) 주택가 공공주차장 조성, 택시 불법영업 단속 등	□	■
사회적 약자 배려	● 사회적 약자에 대한 배려를 검토하였습니까? 예) 여성, 아동, 장애인, 한부모 가정 등	□	■
일자리	● 일자리 창출 효과 및 일자리 수를 검토하였습니까? 예) 직·간접 채용, 취업알선, 전문인력양성, 창업지원 등	□	■
선거법	● 공직선거법에 저촉 여부를 검토하였습니까? 예) 홍보물 배포, 표창수여, 경품지급, 기부행위 등	□	■
안전	● 시민 안전 위험요인과 안전대책을 검토하였습니까? 예) 장소·시설물 점검, 안전관리 인력확보 등	□	■
타 기관	● 타 기관 협의·협력(타 자원 활용 등)을 하였습니까? 예) 중앙부처, 타 지자체, 투자·출연기관, 민간단체 등	■	□	시민단체 협력
홍 보	● 사업 홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 보도자료, 기자 설명회, 현장 설명회 등	□	■
정 책 영문화	● 정책 영문화 및 해외홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 영문 제목‧요약, 해외 언론 보도, 외국어 홈페이지 등	□	■
바른 우리말	● 서울시 행정 순화어 목록을 확인하였습니까? 예) 별첨, 첨부 ⇒ 붙임, 가이드라인 ⇒ 지침 등	■	□	검토완료

동물복지지원센터 인테리어 공사계획

동물보호에 대한 사회적 요구에 부응하고 체계적인 동물복지정책을  추진하기 위해 동물복지지원센터를 조성하고자 함

1		추 진 배 경

□ 추진근거

○ 법적근거 : 동물보호법 제4조제2항, 동물보호조례 제21조, 제22조

○ 관련방침 : 동물복지지원센터 조성계획(’17.2.8)

□ 추진경위

○ ’16.7~12월 : 동물복지지원시설 기본계획 수립 연구

○ ’17.3.15 ~ 5.15: 동물복지지원센터 인테리어 설계용역

2		공 사 개 요

○ 공 사 명 : 동물복지지원센터 인테리어 공사

○ 위    치 : 에스플렉스센터(마포구 매봉산로 31, 지하1층)

○ 규    모 : 면적 591.3㎡(공용포함 총1,476.58㎡)

○ 주요시설 : 동물병원, 반려동물·입양센터, 사무공간, 동물보호교육장 및 커뮤니티룸

○ 공사내용 : 동물병원, 입양센터 및 교육장을 위한 내부 인테리어,

냉난방 및 환기, 위생 및 소방, 조명, 통신설비 등

○ 공사기간 : 착공일로부터 90일 이내

○ 총공사비 :**********

※ 수술 및 진단 장비는 별도 구매

< 에스플렉스센터내 센터 위치 >	< 지하 1층 시설 배치도 >

3		총 공 사 비

(단위 : 원)

구 분	총 공 사 비
	계	도급비	관급자재비
총 계	604,471,000	535,238,000	69,233,000
건 축	336,490,000	336,490,000
기 계	123,111,000	53,878,000	69,233,000
전 기	106,260,000	106,260,000
정보통신	21,010,000	21,010,000
소 방	17,600,000	17,600,000

4		공사 발주계획

건축/기계분야

○ 계약방법 : 제한경쟁입찰(지역제한 :서울시)

※ 근거 : 지방자치단체 입찰 및 계약 집행기준(행정자치규 예규 제88호, 2017.4.11.)

○ 입찰참가 자격

- 건설산업기본법 제8조 및 같은법 시행령 제7조에 의한 실내건축공사업에 등록된 업체로 입찰공고일 전일부터 입찰일(낙찰자는 계약체결일)까지 주된 영업소가 서울시에 소재한 업소

○ 현장설명 : 설계서 열람으로 갈음

2. 전기/소방분야

○ 계약방법 : 제한경쟁입찰(지역제한 :서울시)

※ 근거 : 지방자치단체 입찰 및 계약 집행기준(행정자치규 예규 제88호, 2017.4.11.)

○ 입찰참가 자격

- 전기공사업법 제4조 규정에 의한 전기공사업을 등록하고, 소방시설공사업법에 따른 일반소방시설공사업(전기분야) 또는 전문소방시설공사업을 등록한 업체로 입찰공고일 전일부터 입찰일(낙찰자는 계약체결일)까지 주된 영업소가 서울시에 소재한 업소

※ 다만, 면허보완을 위하여 공동계약(분담이행)이 가능하며, 이 경우 전기공사업을 등록한 업체가 공동 수급 대표자이어야 함

○ 현장설명 : 설계서 열람으로 갈음

3. 통신 분야

○ 계약방법 :1인 견적에 의한 수의계약

○ 계약업체자격기준 : 정보통신공사업법에 의한 정보통신공사업 등록업체

5		공사추진일정

○ ’17. 6월 : 공사 발주 계획 수립 및 공사 발주

○ ’17. 6 ~ 9월 : 공사 시행

○ ’17. 9월 : 개장

6		소 요 예 산

○ 소요금액 : **********

○ 예산과목 : 동물보호과, 선진형 동물보호시스템 구축, 동물보호 및 복지수준 향상, 동물복지지원시설 조성사업, 시설비

7		행 정 사 항

○ 공사 관리를 위해 전문기관에 감리 의뢰

- 동물용 공조시설, 바닥 및 벽체 방수 등 전문성을 요하는 공정을 포함하고 있어, 공사 관리 등을 전문기관에 의뢰하여 사업 품질 향상

붙임 : 동물복지지원센터 인테리어 공사비 산출내역 1부.