투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울대공원
수신자	총무과장
(경유)
제 목	『해양관 기계설비 개보수공사(1차)』설계변경 시행

1. 시설과-5684(‘17. 9. 12.)호와 관련입니다

2.『해양관 기계설비 개보수공사(1차)』와 관련하여 설계변경코자 하오니 조치하여 주시기 바랍니다.

가. 공 사 명 : 서울대공원 해양관 기계설비 개보수공사

나. 공사금액 : *************

다. 공사기간 :‘16. 12. 12. ~‘17. 10. 19.

라. 계약업체 : ㈜일승기계산업  대표 김병근

마. 설계변경 사항

(단위 : 원)

구 분	변 경 전	변 경 후	증 감
계약금액	***********	***********	************
공사기간	‘16. 12. 12. ~ ‘17. 10. 19.	‘16. 12. 12. ~ ‘17. 11. 18.	증 30일

- 설계변경 증가금액(10,873,400원)은‘17년도 「해양관 기계설비 개보수사업」 예산으로 충당

- 설계변경 사유 : 공사추가, 실 시공물량 반영

- 공사기간 연기사유: 추가 공사 및 선행공정 일정을 반영

바. 예산과목: 공원이용시민만족도향상, 동물사관리기능및야생동물종보전, 공원안전시설보수및정비, 시설비(해양관 기계설비 개보수사업)

붙임  1. 설계변경 방침서 1부.

2. 설계변경 내역서 1부.

3. 합의각서 각 1부.  끝.

	시설과장
주무관	박도원		주무관	조대복		시설과장	09/12 오임석
협조자	주무관	정한성		총무과장	이행용		전략기획실장	김정열
시행	시설과-5711	(		)	접수		(		)
우	13829	경기도 과천시 대공원광장로 102	/	http://grandpark.seoul.go.kr
전화	02-500-7423	/전송	02-507-7230	/		/	부분공개(7)