문서번호	시설과-6059
결재일자	2017.9.25.
공개여부	부분공개(7)
방침번호

					시 민
주무관	주무관	시설과장	관리부장
박도원	조대복	오임석	09/25 박진순
협 조

『노후동물사 기계설비 개선공사(난방설비)』

- 공사기간 연기 검토 보고 -

2017. 9.

서울대공원

(시 설 과)

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
시민 참여	● 시민 의견 반영 및 사업 참여 방안을 검토하였습니까? 예) 청책토론회, 설문조사, 시민공모 등	□	■
전문가 자문	● 관련 전문가 의견을 반영하였습니까? 예) 자문위원회 개최, 타당성 검토, T/F 운영 등	□	■
갈 등	● 이해 당사자 간 갈등발생 가능성을 검토하였습니까? 예) 주택가 공공주차장 조성, 택시 불법영업 단속 등	□	■
사회적 약자 배려	● 사회적 약자에 대한 배려를 검토하였습니까? 예) 아동, 장애인, 한부모 가정 등	□	■
성별분리통계	● 성별분리통계 작성여부를 검토하였습니까? 예) 인적통계 남·여 구분, 수혜집단의 남·여 구분 등	□	■
일자리	● 일자리 창출 효과 및 일자리 수를 검토하였습니까? 예) 직·간접 채용, 취업알선, 전문인력양성, 창업지원 등	□	■
선거법	● 공직선거법에 저촉 여부를 검토하였습니까? 예) 홍보물 배포, 표창수여, 경품지급, 기부행위 등	□	■
안전	● 시민 안전 위험요인과 안전대책을 검토하였습니까? 예) 장소·시설물 점검, 안전관리 인력확보 등	□	■
타 기관	● 타 기관 협의·협력(타 자원 활용 등)을 하였습니까? 예) 중앙부처, 타 지자체, 투자·출연기관, 민간단체 등	□	■
홍 보	● 사업 홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 보도자료, 기자 설명회, 현장 설명회 등	□	■
정 책 영문화	● 정책 영문화 및 해외홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 영문 제목‧요약, 해외 언론 보도, 외국어 홈페이지 등	□	■
바른 우리말	● 서울시 행정 순화어 목록을 확인하였습니까? 예) 별첨, 첨부 ⇒ 붙임, 가이드라인 ⇒ 지침 등	■	□
결재문서공개	● 공개 여부를 “비공개”로 설정했다면 법적근거를 명확히 검토하였습니까? 예) 정보공개법 제9조 제1항 제1호~제8호	□	■

「노후동물사 기계설비 개선공사(난방설비)」

공사기간 연기 검토 보고

대공원 「노후동물사 기계설비 개선공사(난방설비)」 의 현장 여건의 문제로 공사기간을 연기코자 합니다.

1		공사개요

□ 공 사 명: 서울대공원 노후동물사 기계설비 개선공사(난방설비)

□ 공사기간: ‘17. 7. 5. ~ ’17. 10. 12.

□ 계약금액:*************

□ 계 약 자: ㈜대삼이엔지 대표 이재덕

2		준공기한 연기사유

□ 대기환경보전법 제23조제3항과 같은 법 시행규칙 제27조

- 대공원은 대기오염물질발생량 제4종사업장으로 추가 설치되는 가스 보일러는 저녹스버너를 설치하고「대기배출시설 변경신고」를 득한후 설비를 시공해야 함.

- 따라서 대기배출시설 변경신고서 작성 및 신고기간이 20일 추가 소요됨.

3		추진계획

□ 해당공사 및 해양관, 야행관 기계설비공사의 가스보일러 설치 변경신고서도 포함하여 제출할 예정

□ 지체상금 부과여부: 미부과

□ 용역기간: 20일 연기

구 분	당 초	변 경 후	증 감
공사기간	‘17. 07. 10. ～ 10. 12.	‘17. 07. 10. ～ 11. 01.	증 20일간

끝.