의원 요구 자료 제출

시 행	교통정책과-8314
결재일자	2017.10.11.
공개여부	대시민공개
접수번호
접수일자
수 신 자	기획담당관

주무관		스마트교통팀장	교통정책과장	교통기획관	도시교통본부장	결재
김동천		김은혜	구종원	이대현	10/11 고홍석
협 조

제 목	국회의원 요구자료 제출(요구번호 1629번, 윤관석 의원, 국토교통위원회)

따로붙임 : 국회의원 요구자료 1부.  끝.

윤관석 의원(국토교통위원회, 더불어민주당)

[요구번호 : 1629번]

1. 170929_서울특별시 자료요구(교통카드시스템 관련)

* 서울시 도시철도운영기관 교통카드시스템 구축사업 관련

- 사업개요, 진행상황, 향후계획

- 사업과 관련하여 서울시의회 지적사항 및 조치사항

□ 의원님이 요구하신 내용에 대해 답변 드립니다.

○ 사업개요

- 추진목적 : ’04년 도입 노후시스템 개선 및 변화된 교통/통신환경 대응

- 사업내용 : 도시철도 게이트내 개‧집표기, 집계･센터시스템, 통신환경 등 개선

- 사업주체 : 서울교통공사

- 사업기간 : [구축] ’16.11~’17.11(12개월) / [운영] 10년간

- 사업예산 : 비예산 사업(사업시행자 부담, 463억원)

- 추진경과 : ’16.06.03  사업 공고(~7.18, 45일)
’16.07.20  제안서 평가 및 우선협상대상자 선정
【1순위】에스트래픽 컨소시엄 【2순위】LG CNS 컨소시엄
’16.08.01  기술 협상(서울교통공사-에스트래픽 컨소시엄, ~8.25)
’16.11.03  사업 착수

○ 진행상황 : 공정률 87.02%(10.5일 기준)

- 센터시스템 구축 : 97.6%

- 통신환경 개선 : 90.5%

- 통합시험 : 100%

- 집계시스템 구축 : 89.1%

- 단말기(개발·제작·설치) : 73.5%

○ 향후계획

- ’17. 10월   단말기 · 집계시스템 교체

- ’17. 11월   사업 준공(예정)

○ 사업과 관련하여 서울시의회 지적사항 및 조치사항

구분	내용
지적사항	○ 2016년 행정사무감사(’16.11) - 도시철도 교통카드시스템 구축사업과 관련해서 사업시행자가 최초 제안한 특별제안 내용이 명확히 담보되도록 조치할 것
조치사항	○ 추진상황 : 조치 완료 ○ 추진주체 : 서울교통공사, 사업시행자 ○ 추진내용 : 사업시행합의서(’16.11), 변경 합의서 체결(’16.12) - 당초 사업시행자는 특별제안으로 서울교통공사에 163.5억원을 7년간(’21~’27) 분할 납부하는 내용을 제안하였으나, - 서울교통공사와 사업시행자는 협상을 통해 서울교통공사의 요청이 있을 경우163.5억원을 일시에 납부하도록 하였고. - 이 경우에는, 사업시행자가 납부할 특별제안금액을 163.5억원(’21~’27)에서 현재가치(’17년)로 환산한 96.6억원으로 함(사업시행합의서, ’16.11) - 다만, 향후 특별제안금액의 납부시기를 2018년 이후로 조정할 경우에는 현재가치 금액(96.6억)에 사회적 할인율(5.5%)을 적용한 금액을 납부하도록 하고, - 만일, 사업시행자가 최초 제안 내용과 같이 7년간(’21~’27) 분할 납부할 경우에는, 총 163.5억원을 서울교통공사에 납부하도록 함(변경합의서, ’16.12)

끝.

작성자	소속	직위	성명
	교통정책과	담당사무관	김은혜
	☎2133-2256	주무관	김동천
	작성일	2017. 10. 10(화)