국회의원 요구 자료 제출

시 행	교통정책과-8617
결재일자	2017.10.16.
공개여부	대시민공개
접수번호
접수일자
수 신 자	기획담당관

주무관		도시철도관리팀장	교통정책과장	교통기획관	도시교통본부장	결재
전재현		윤석환	구종원	이대현	10/16 고홍석
협 조

제 목	국회의원 요구자료 제출(요구번호 1,355번, 이학재 의원, 국토교통위원회)

따로붙임 : 국회의원 요구자료 1부.  끝.

이학재 의원(국토교통위원회, 바른정당)

[요구번호 : 1355번]

9. 구의역 사고 이후 조치현황, 향후계획

□ 의원님께서 요구하신 구의역 사고 이후 조치현황과 향후계획을 다음과 같이 제출합니다.

지하철 안전 분야 직영 전환(안전업무직 신설)

○ 대상분야 : 시민안전과 직결되는 핵심 안전 7개 업무분야

- 서울메트로(조건부 민간위탁) : PSD유지보수, 구내운전 등 5개 분야

- 도시철도공사(자회사) : 도시철도ENG 내 전동차정비 등 2개 분야

○ 직무형태 : 무기계약직 형태의『안전업무직』신설

○ 채용방식 : 기술력 등 검증 통해 경력‧기술 보유자 공개경쟁 채용

- 안전업무직 임용, 직영전환 완료(`17.1.1)

□ 김포공항역 등 8개역 전면교체 추진

○ 승강장안전문 전수조사 결과에 따라 시민 안전 확보를 위해 9개 노후역사 9개 전면 재시공(’16.11.3. 기자설명회)

- 대상역사 : 김포공항, 우장산, 왕십리, 군자, 광화문, 방배, 신림, 성수, 을지로3가

○ 추진경과

- 양 공사 공동 TF 구성, 서울시 부품표준 설계 강화기준 마련(’17.1.)

‣ 서울시 승강장안전문 표준시방서 마련(KRS 준수, RAMS 적용)

- 우장산역 재시공 계약 완료(’17.7.17)

‣ 국제안전인증 획득 시범역사 지정추진(준공 : ’18.11. 예정)

○ 추진일정

- 입찰공고 및 계약 체결 : ’17.10월 계약체결 예정 (’17.8.25. 공고)

계약체결	구조체 진단, 설계검증, 시험검사	운영교육, 시운전, 준공
’17. 9월	’17. 10월 ~ ’19. 1월	’19. 2월 ~ 3월

※ ’19.3. 준공 예정으로 SIL 인증社 참여유도 기간단축 노력

□ 승강장안전문 레이저 센서 교체

○ 기존 장애물 검지센서에 비해 성능이 우수하고 작업자의 안전확보에 유리한 레이저센서로 전면 교체

○ 추진경과

- 1단계 대상 53개 역사 중 12개 역사 교체 완료

‣ 서울역, 역삼역 교체 완료(’16.12.), 당산역 등 10개 역(’17.4.)

- 1단계 미설치 역사(41개) 및 2단계 역사(83개) 조기 교체 진행 중

‣ 1~4호선 : 95개역 중 44개역 설치 완료(’17.7. 현재 공정률 46.3%)

‣ 5~8호선 : 29개역 금년 말 교체 완료 예정(’17.7. 계약, 8월 착공)

○ 추진일정

- 1단계 미설치 41개 및 2단계 83개 역사 교체 완료(’17.12.)

- 2단계 대상 235개 역사 교체 추진(~’18.)

□ 승강장안전문 고정문 철거, 비상문 교체

○ 안전하고 신속한 탈출 통로 확보를 위해 고정문을 비상문으로 교체

○ 추진경과

- ’17년도 비상문 교체 대상 56개역 교체 진행(’17.7. 사업자 선정 완료)

‣ 1~4호선  15개 역 / 5~8호선  41개 역

○ 추진일정

- ’17. 정부추경(223억원) 및 시 추경(167억원)이 확정됨에 따라 교체시기를 앞당겨 추진 예정

‣ 당초 ’21년까지 단계적 추진 계획이나 향후 일정 조정 검토

□ 지하철 노후시설 개선 투자

○ 지하철 1~4호선 노후시설 개선

- 사업대상 : 개통 후 사용연수 25년 이상 경과된 18개시설(’20년 완료예정)

- 총사업비 : 1조 3,552억 원(국비 2,343억, 시비 7,805억, 공사 3,404억)

○ 지하철 노후전동차 교체

-  사업규모 : 장기사용 노후 전동차  620량(2,3호선) 교체(’22년 완료 예정)

-  총사업비 : 7,846억원(시비 1,130억, 공사 6,716)

○ 지하철 1~4호선 내진보강

- 사업대상 : 내진성능이 미 확보된 1~4호선 구조물(’20년 완료예정)

- 총사업비 : 3,220억원(국비 1,048억, 시비 1,086억, 공사 1,086억)

○ 기타 안전시설 개선 및 설치사업(총 40,267억)

- 운영기관 자체 노후시설 개선, 열차 유무선 및 전송망 개량, 승강편의시설 설치 등

작성자	부 서 명	직 위	성 명
	교통정책과	담당사무관	윤 석 환
	☎ 2133-2245 2133-2249	담당자	전 재 현 장 연 수
	작 성 일 : 2017. 10