문서번호	행정지원과-10265
결재일자	2017.11.9.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		행정지원과장	서울도서관장
최문환		이현숙	11/09 이정수
협조

헌책보물섬 조성사업

설계내역서 보완 검토

2017. 11.

서울도서관

(행정지원과)

헌책보물섬 조성사업 설계내역서 보완 검토

헌책보물섬 조성사업과 관련하여 사업추진 경과를 보고드리고 기존 설계내역서를 보완하여 계약심사 및 사업추진코자 함

Ⅰ		사업개요

□ 사업개요

○ 위  치 : 송파구 오금로 1 (잠실나루역 인근, 신천유수지)

○ 규  모 : 지상1층, 연면적 1,465㎡ (기존 3동 건축물 리모델링)

○ 사업비 : 3,692백만원

○ 장서 소장규모 : 약 25만권

○ 기  간 : ’15. 6. ~ ’18. 7.

Ⅱ		추진현황

□ 추진경과

○ ’15. 9.  2 : 헌책보물섬 조성사업 추진계획 수립

○ ’15. 9.24 : 타당성 조사 및 기본계획 수립용역 준공

○ ’15.12.22 : 구조안전진단

○ ’15.12.30 : 헌책보물섬 조성사업 추진계획 수립

○ ’16. 9.31 : 실시설계 완료

○ ’16.11.22 : 헌책보물섬 조성사업 변경계획(행정1부시장 방침)

○ ’17. 5.19 : 타당성 조사 검증 완료

○ ’17. 6.16 : 수시투자심사(결과 : 조건부 추진)

○ ’17. 11월 현재 : 건축물 정밀안전진단 실시 및 계약심사 진행 중

Ⅲ		설계내역서 보완내용

□ 보완사유

○ 계약심사과 보완요청-19336(17.10.27)호

□ 보완내용

○ 공통분야

- 각 분야별 XML 내역파일

- 공사원가 제비율 수정

- 2017년 하반기 시중노임단가 적용

○ 건축분야

- 철거공사 작업부산물 이윤으로 반영

- 산업안전보건관리비 산출근거

- 폐기물처리 별도 발주 대상으로 내역서 분리 작성

○ 토목분야

- 특정공법(자재)관련사항 : 선정심의 위원회, 특별시방서 및 상세도면

- 특종공종 일위대가 산출근거

- 자재단가조서, 중기사용료 보완

○ 기계분야

- 노무비 산출방식변경

○ 전기·통신분야

- 전기·통신 분리발주 대상으로 각 분야별 작성

□ 검토내용

○ 헌책보물섬 조성사업 실시설계가 ‘16.9월 완료됨에 따라 ’17년도 시중노임단가 등을 적용을 위해 내역서 수정조치 필요

○ 기존 실시설계 업체와 수의계약하여 내역서 수정하여 계약심사 보완 및 12월까지 공사발주 추진

□ 용역개요

○ 건    명 : 헌책보물섬 조성사업 설계내역서 변경 용역

○ 소요예산 : 금 4,400,000원(금사백사십만원, 부가세포함)

○ 계약기간 : 계약일로부터 10일이내

○ 계약방법 : 수의계약

- 수의계약사유 : 추정각격이 2,000만원 이하 소액 수의계약으로 기존 설계내역을 작성한 업체로 선정하여 조속히 사업추진

○ 예산과목 : 서울도서관 행정지원과, 도서관 및 독서문화 진흥, 도서관시설 확충, 헌책 보물섬 조성사업, 시설비

Ⅳ		향후계획

○ ’17. 11.       : 계약심사 및 일상감사

○ ’17. 12.       : 공사입찰공고 및 계약

○ ’18.   1.        : 공사착공

○ ’18.   7.~10. : 공사준공 및 시설개관.  끝.