문서번호	정보기획담당관-18244
결재일자	2017.11.13.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

		시 민
주무관	사물인터넷정책팀장	정보기획담당관
김유식	김은영	11/13 이기완

- 사물인터넷 실증지역 통신망 구축공사 -

설  계  변  경  계  획

2017. 11.

정보기획담당관

-사물인터넷 실증지역 통신망 구축공사-

설  계  변  경  계  획

어린이대공원 사물인터넷 실증지역 통신망 구축공사에 환경제어센서 설치를 위한 공사물량이 추가 발생된바, 시급성을 감안하여 공사에 반영하여 설계변경코자 함.

Ⅰ		관련근거

사물인터넷 실증지역 통신망 구축계획 (정보기획담당관-12929/’17.08.08)

IoT실증사업 인프라공사(추가) 협조요청 (서울어린이대공원-8252/’17.11.12)

Ⅱ		공사개요

건    명 : 사물인터넷 실증지역 통신망 구축공사

공사범위

광케이블 포설 및 접속, 구내 UTP케이블 포설

무선AP 19개소 설치

계약금액 : 163,414,310원

계 약 자 : ******************

공사기간 : 2017. 10. 12. ~ 2017. 12. 10

Ⅲ		설계변경안

주요내용

구 분	당 초	변 경	사 유
공사내역	-	광케이블 포설 및 접속 추가 무선AP 3개 추가 등	전기실 IoT센서 추가 설치에 따른 및 안정적인 네트워크 구성필요 (어린이대공원)
계약기간	'17. 10 .12. ~ 12.10	'17. 10 .12. ~ 12.10	변경없음
계약금액	************	************	시공내역 추가로 증액

추가내역

공 종	규격	단위	변경전	변경후	비 고
광케이블포설	SM-12C	M	1,595	1,995	증)400
광케이블접속	12코아	코아	208	256	증)48
광케이블분배반	FDF-12C	EA	17	19	증)2
광케이블접속함체		EA	4	5	증)1
광케이블점퍼코드	SM(SC-LC) 3M	EA	42	46	증)4
광피그테일	SM-1.5M	EA	200	208	증)8
UTP케이블	CAT-5E	M	545	695	증)150
산업용스위치	10/100/1000BASE-T	대	14	16	증)2
무선AP실내용	802.11ac	대	4	7	증)3

소요예산 : 증 14,730,690원

구 분		당 초	변 경	증ㆍ감	비 고
직 접 공사비	재료비	**********	**********	*********
	노무비	**********	**********	*********
	간접노무비	*********	*********	*******
경비		**********	**********	*********
일반관리비		*********	*********	*******
이 윤		*********	*********	*******
공급 가액		***********	***********	**********
부가가치세		**********	**********	*********
총공사비		***********	***********	**********

예산항목

정보기획담당관, 지식정보사회 선도기반구축, 정보화 기반시설 확충,

서울 사물인터넷 도시조성, 시설비

Ⅳ		행정사항

재무과 설계 변경 의뢰   :  2017. 11. 15

붙 임 : 1. 변경설계서 1부.

2. 어린이대공원 협조 공문 1부. 끝.