투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시도시기반시설본부
수신	수신자참조
(경유)
제목	별내선(8호선연장) 건설공사(1공구) 지장물 이설협의

1. 귀 청(부서)의 무궁한 발전을 기원하오며 도시철도사업부-9472(2017.8.31.)호, 별내 감1-17-53호(2017.11.24.)와 관련입니다.

2. 국토교통부고시 제2017-382호로 도시계획시설 결정되어 우리시(본부)에서 시행중인「별내선(8호선연장) 건설공사(1공구)」의 사업구간내 저촉시설물에 대하여 아래와 같이 이설협의 하오니 소관 시설에 대한 검토 결과를 2017.12.13(수)까지 회신하여 주시기 바랍니다.

가. 지장물 현황

부 서 명		계	시 설 내 용	이 설 계 획
강동구청	교통행정과	70개소	표지판, 반사경	공사구간 외 이설
		250m	휀스	공사구간 외 이설
	도로과	21개소	가로등(맨홀 1개소)	공사구간 외 이설
	부동산정보과	2개소	지적도근점	공사구간외 이설(철거)
	푸른도시과	56주	가로수(은행나무, 벚나무)	공사구간 외 이설
강동소방서		4개소	소화전(맨홀 8개소)	공사구간 외 이설
강동경찰서		20개소	신호등	공사구간 외 이설
		3개소	신호제어기(맨홀 8개소)	공사구간 외 이설
한국전력공사 강동지사		7개소	한전주 (변압기 9개, 맨홀 12개소)	공사구간 외 이설
㈜케이티 강동지원센터		3개소	공중전화부스	공사구간 외 이설
		2개소	체신주(맨홀 9개소)	공사구간 외 이설

나. 공사내용

구 분	공사구간	작업내용	공사기간
별내선 1공구 (L=1,184m) (전구간 개착)	올림픽로(L=320m) (강동구 암사동 463 ∼ 213-2)	○가시설공(줄파기, H-Pile근입, 복공, PCF,CIP, 토류벽Con'c) ○토공(굴착, 되메우기), 포장공 ○구조물공 및 방수공, 부대공	2017. 12. 15 ∼2023. 8. 21
	아리수로(L=464m) (강동구 암사동 199-3 ∼ 377-3)	○가시설공(줄파기, H-Pile근입, 복공, PCF,CIP, 토류벽Con'c) ○토공(굴착, 되메우기), 포장공 ○구조물공 및 방수공, 부대공

첨부 : 1) 지장물도 각 1부

2) 지장물조사서 및 사진대지 각 1부(별도송부). 끝.

	서울특별시도시기반시설본부장
수신자	강동구청장(교통행정과장),강동구청장(도로과장),강동구청장(부동산정보과장),강동구청장(푸른도시과장),강동소방서장(소방행정과장),서울강동경찰서장(교통과장),한국전력공사(강동지사),(주)KT 강동지원센타
주무관	신익현		신교통1과장	김종상		도시철도사업부장	11/28 박동룡
협조자	주무관	왕태현
시행	도시철도사업부-12480	(		)	접수		(		)
우	04520	서울특별시 중구 청계천로 8(무교동 96번지) 프리미어 플레이스빌딩(9층)	/	WWW.seoul.go.kr
전화	02-772-7189	/전송	02-772-7305	/	caram00@seoul.go.kr	/	대시민공개