서울특별시공고 제2017-2428호

도시계획시설(도로)사업 실시계획 변경인가를 위한 열람공고

1. 양주 별내지구 광역교통개선대책의 일환으로 서울특별시 노원구고시 제2011-61호(2011.12.8.)로 도시계획시설(도로) 경미한 변경결정 및 지형도면 고시, 서울특별시고시 제2015-53호(2015.02.26.)로 실시계획인가, 서울특별시고시 제2017-65호(2017.03.02.)로 실시계획 변경인가 고시된 『남양주 별내지구 주변도로(서울시구간-화랑로) 확장 및 지하차도 설치공사』에 대하여 도시계획시설(도로)사업 실시계획 변경인가 신청이 있어, 「국토의 계획 및 이용에 관한 법률」 제88조 및 같은법 시행령 제97조에 의거 도시계획시설(도로)사업 실시계획변경 작성하고, 같은법 제90조 및 같은법 시행령 제99조에 따라 아래와 같이 열람 공고합니다.

2. 관계도서는 한국토지주택공사 서울지역본부 및 서울특별시 도로계획과에 비치하여 일반인에게 열람하오니, 열람내용에 대하여 의견이 있으신 분은 열람기간 내 의견서를 열람장소에 서면으로 제출하여 주시기 바라며, 기타 자세한 사항은 열람 장소로 문의하여 주시기 바랍니다.

2017년  12월   일

서 울 특 별 시 장

가. 사업시행지의 위치 : 서울특별시 노원구 공릉동 26-84 일원 (변경없음)

○ 시점 : 서울특별시 노원구 공릉동 26-69 (가스충전소)

○ 종점 : 서울특별시 노원구 공릉동 26-84 (서울시계)

나. 사업의 종류 및 명칭 (변경없음)

○ 종 류 : 도시계획시설(도로) 사업

○ 명 칭 : 남양주 별내지구 주변도로(서울시구간-화랑로) 확장 및 지하차도 설치공사

다. 사업시행 규모 (변경없음)

○ 폭 38→42m, 연장 323m, 면적 18,215㎡

라. 사업시행자의 성명 및 주소 (변경없음)

○ 성 명 : 한국토지주택공사장(LH공사장)

○ 주 소 : 경상남도 진주시 충의로 19(충무공동)

마. 사업의 착수 및 준공 예정일 (변경)

○ 실시계획인가 고시일(2015. 02. 26.) ~ 2017. 12. 31. (당 초)

○ 실시계획인가 고시일(2015. 02. 26.) ~ 2018. 06. 30. (변 경)

바. 자금조달방안 : 붙임2 (변경)

사. 수용 또는 사용할 토지 또는 건물의 소재지·지번·지목 및 면적, 소유권과 소유권외의 권리의 명세 및 그 소유자·권리자의 성명·주소 : 붙임1 (변경없음)

아. 공공시설 등의 귀속 및 양도에 관한사항 : 국토의 계획 및 이용에 관한 법률 제99조에 의함. 단, 사업시행자는 준공 전에 관련 지방자치단체간 협의를 통하여 시설물 관리청 등을 명확히 하여야 하며, 시설물을 관리청에 인수인계 전까지는 사업시행자가 유지관리 시행함. (변경없음)

자. 열람 등 기타 자세한 사항은 한국토지주택공사 서울지역본부 남양주사업단 (☎031-528-5474), 서울특별시 도로계획과(☎02-2133-8087)에 문의하시기 바랍니다.

차. 열람기간 : 열람공고일로부터 14일간

【붙임1】

용 지 조 서

대로 1-13호선

일련 번호	소재지	지번	지목	지적면적 ( ㎡ )	편입면적 ( ㎡ )	소유자 및 관계인		비고
						성명	주소
1	노원구 공릉동	26-95	주	13	13	한국토지 주택공사	경기도 성남시 분당구 돌마로 172
2	노원구 공릉동	26-96	잡	15	15	한국토지 주택공사	경기도 성남시 분당구 돌마로 172
3	노원구 공릉동	26-98	대	56	56	한국토지 주택공사	경기도 성남시 분당구 돌마로 172
4	노원구 공릉동	26-97	잡	1,354	1,354	한국토지 주택공사	경기도 성남시 분당구 돌마로 172
5	노원구 공릉동	26-93	도	12,544	12,544	서울시	서울시
6	노원구 공릉동	26-94	학	4,233	4,233	한국토지 주택공사	경기도 성남시 분당구 돌마로 172
총개				6필지	18,215

【붙임2】

자금조달방안

□ 단계별 집행계획 (당초)

(단위 : 억원)

구 분	계	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	비 고
계	96	20	21	-	-	-	20	35
용 지 비	41	20	21	-	-	-	-	-
공 사 비	55 (110)	-	-	-	-	-	20 (50)	35 (60)	서울시구간 (담터1 전체)

□ 단계별 집행계획 (변경)

구 분	계	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	비 고
계	96	20	21	-	-	-	20	25	10
용 지 비	41	20	21	-	-	-	-	-
공 사 비	55 (110)	-	-	-	-	-	20 (50)	25 (40)	10 (20	서울시구간 (담터1 전체)

※ 재원조달은 한국토지주택공사 자체예산으로 집행함(공사여건에 따라 사업비 변경 가능)