문서번호	정보기획담당관-19688
결재일자	2017.12.4.
공개여부	부분공개(2)
방침번호

		시 민
주무관	사물인터넷정책팀장	정보기획담당관
김유식	김은영	12/04 이기완

- 2017년 서울 사물인터넷(IoT) 도시조성 실증사업 -

자치구 실증지역 통신망 구축결과 보고

2017. 12.

정보기획담당관

- 2017년 서울 사물인터넷(IoT) 도시조성 실증사업 -

자치구 실증지역 통신망 구축 결과 보고

사물인터넷을 활용하여 도시문제를 해결하기 위한 자치구 실증지역에 통신 인프라 구축 결과를 보고드림.

1		관련근거

’17년 서울 사물인터넷 도시조성 추진 계획(정보기획담당관-1856호, ’17.2.3)

자치구 실증지역 통신망 구축계획(정보기획담당관-8270호, ’16.2.24.)

자치구 실증지역 예산재배정 계획(정보기획담당관-8939호, ’16.6.7.)

’17년 사물인터넷 자치구 실증지역(4개소)

연번	해당자치구	실증지역	비고
1	용 산 구	이 태 원	관광‧상권분야
2	노 원 구	중계본동	일반주택분야
3	은 평 구	불광2동	″
4	서대문구	연 희 동	″

2		추진경과

자치구별 실증지역내 현장실사 및 1차 설계 ········· 2017. 4월

1차 설계시안을 시와 합동으로 현장실사 및 최종 설계······2017. 5월

공사 금액 예산재배정··································· 2017. 6월

무선AP 조달 구매······································ 2017. 7월

자치구별 공사 시행··························· 2017. 7월 ~ 11월

현장 점검 및 검수···························  11월 27일 ~ 11월 30일

3		구축결과

AP설치수량 및 예산집행금액

(단위:개,원)

자치구	개소수	AP수량	재배정액	집행금액	집행잔액
용 산 구	18	40	294,998,000	247,856,400	47,141,600
노 원 구	20	30	185,280,000	185,280,000	0
은 평 구	32	50	154,396,000	134,555,000	19,841,000
서대문구	25	49	183,304,000	183,281,770	22,230
합 계	95	169	817,978,000	750,973,170	67,004,830

4		향후계획

공공와이파이 운영관리 및 물품 사용전환 ······  정보통신보안담당관

광케이블 유지관리 ······························  해 당 자 치 구

붙임 : 1. 설치현황 1부.

2. 자치구별 준공도서 1부.(별도첨부)  끝.