투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울시립미술관
수신자	내부결재
(경유)
제 목	변경계약(계약기간 연장) 시행

1. ESS(에너지저장장치) 조달구매 계약 변경 계획(총무과-9075, 2020.8.27.)과 관련입니다.

2. 난지창작스튜디오 ESS(에너지저장장치) 조달구매와 관련, 아래와 같이 변경계약을

시행하고자 합니다.

가. 계약건명 : 난지창작스튜디오 태양광 연계용 ESS 제작구매 설치 (변경)

나. 계약업체 : 국제통신공업 주식회사(대표: 김성조)

다. 변경계약 내용

계약기간	변경전	**********************
	변경후	***********************

※ 계약금액 : 변경없음

붙 임 : 1. ESS(에너지저장장치) 조달구매 계약 변경 계획 1부

2. 감리의견서, 실정보고서 각 1부

3. 합의각서(별첨), 준공기한 연기의뢰서 각 1부. 끝.

주무관	김종민		주무관	신현성		총무과장	08/28 代한문희
협조자	주무관	주옥금
시행	총무과-9100	(		)	접수		(		)
우	04515	서울특별시 중구 덕수궁길 61 (서소문동)	/	http://sema.seoul.go.kr
전화	02-2124-8878	/전송	02-2124-8830	/	seminarium@seoul.go.kr	/	부분공개(5)