투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
		서울특별시한강사업본부
수신	총무과장
(경유)
제목	관급자재(조경석) 수량 변경(증) 요청(여의샛강 하천환경개선공사)

우리본부에서 시행 중인 여의샛강 하천환경개선공사에 소요되는 관급자재(조경석)에 대하여 아래와 같이 수량 변경(증)을 요청하오니 조치하여 주시기 바랍니다.

○ 수량변경 요청내역

품명	규 격 (G2B식별번호)	단위	당 초			변경			증,감		납품요구번호	납품 기한
			수량	단가	금액	수량	단가	금액	수량	금액
조경석	KB-3, 500x600x700㎜,R5이상~R15미만 (22780727)	톤	509	28,600	14,557,400	746	28,600	21,335,600	증) 237	증) 6,778,200	12-21-1-98008-01	2021/11/30
	KB-3, 600x700x850㎜,R5이상~R15미만 (22780728)	톤	519	31,100	16,140,900	733.25	31,100	22,804,070	증)214.25	증) 6,663,170
	KB-3, 600x800x900㎜,R5이상~R15미만 (22780729)	톤	16.25	33,000	536,250	16.25	33,000	536,250	-	-
소계					31,234,550			44,675,920		증)13,441,370
수수료	0.54%				168,660			241,240		증) 72,580
합계					31,403,210			44,917,160		증)13,513,950

○ 변경사유 : 추가공사 시행에 따른 수량 증가

○ 예산과목 : 한강사업본부 치수과, 치수 및 하천 관리, 하천복원 및 정비, 한강관광자원화사업, 시설비및부대비, 시설비(국비).  끝.

							치수과장
주무관							박지수			치수과장					11/29 최연호
협조자
시행			치수과-7469									(						)		접수											(						)
우	04770					서울시 성동구 강변북로 257(성수동1가 642-25)															/
전화								/전송								/													/	부분공개(5)