문서번호	도시철도토목부-20328
결재일자	2022. 3. 30.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

			시 민
주무관		토목2과장	도시철도토목부장
장대성		권순환	03/30
			최병훈
협 조

『진접선(4호선 연장) 차량기지 1공구 건설공사』

휴일 및 야간 작업계획 검토 보고(22년 4월)

2022. 3.

도시기반시설본부

(도시철도토목부)

『진접선(4호선 연장) 차량기지 1공구 건설공사』

휴일 및 야간 작업계획 검토 보고(22년 4월)

「진접선(4호선연장) 차량기지 1공구(인입선) 건설공사」와 관련하여‘22년 4월 휴일 및 야간 작업계획 승인 요청’에 대하여 검토보고 함. ※ 동명감 진접1 제2022-123호(2022.03.29.)

□ 관련근거

ㅇ 공사계약 특수조건 제11조(휴일 및 야간작업)

ㅇ 건설사업관리 과업내용서 6.3 휴일 및 야간근무에 대한 건설사업관리대가 지급

- 야간근무는 주․야간으로 산출된 공사비에 의거 건설사업관리대가를 산출하였으므로 추가 지급 제외

- 휴일근무는 필요시 적정인원을 배치하고 원인자가 건설사업관리대가 부담

□ 휴일작업 계획

ㅇ 세부내용

작업일	휴일 형태	작업위치	작업내용	관리자
				감리단	시공사
04월01일 (금)	야간	- 작업구1 (환기구#1)	단선터널 상선, 하선 굴진	******	********
		- 작업구2 (환기구#2)	종점부 굴진, 시점부 암반청소 시점부 중앙배수관 및 바닥 미굴부깨기
		- 인입선 종점부	작업없음
04월02일 (토)	휴무일	- 작업구1 (환기구#1)	단선터널 상선, 하선 굴진	******	******** ******** ******** ******** ********
		- 작업구2 (환기구#2)	종점부 굴진, 시점부 암반청소 시점부 중앙배수관 부설 및 골재포설
		- 인입선 종점부	인입부 토공 절취 갱문 설치
04월03일 (일)	휴일	- 작업구1 (환기구#1)	작업없음	******	******** ******** ********
		- 작업구2 (환기구#2)	작업없음
		- 인입선 종점부	개착 1단사면 발파암 깎기 및 사면보강

작업일	휴일 형태	작업위치	작업내용	관리자
				감리단	시공사
04월04일 (월)	야간	- 작업구1 (환기구#1)	단선터널 상선, 하선 굴진	******	********
		- 작업구2 (환기구#2)	종점부 굴진, 시점부 암반청소 시점부 중앙배수관 및 바닥 미굴부깨기
		- 인입선 종점부	작업없음
04월05일 (화)	야간	- 작업구1 (환기구#1)	단선터널 상선, 하선 굴진	******	********
		- 작업구2 (환기구#2)	- 종점부 굴진, 시점부 암반청소 시점부 중앙배수관 및 바닥 미굴부깨기
		- 인입선 종점부	작업없음
04월06일 (수)	야간	- 작업구1 (환기구#1)	단선터널 상선, 하선 굴진	******	********
		- 작업구2 (환기구#2)	종점부 굴진, 시점부 암반청소 시점부 중앙배수관 및 바닥 미굴부깨기
		- 인입선 종점부	작업없음
04월07일 (목)	야간	- 작업구1 (환기구#1)	단선터널 상선, 하선 굴진	******	********
		- 작업구2 (환기구#2)	종점부 굴진, 시점부 암반청소 시점부 중앙배수관 및 바닥 미굴부깨기
		- 인입선 종점부	작업없음
04월08일 (금)	야간	- 작업구1 (환기구#1)	단선터널 상선, 하선 굴진	******	********
		- 작업구2 (환기구#2)	종점부 굴진, 시점부 암반청소 시점부 중앙배수관 및 바닥 미굴부깨기
		- 인입선 종점부	작업없음
04월09일 (토)	휴무일	- 작업구1 (환기구#1)	단선터널 상선, 하선 굴진	*******	******** ******** ******** ********
		- 작업구2 (환기구#2)	종점부 굴진, 시점부 암반청소 시점부 중앙배수관 부설 및 골재포설
		- 인입선 종점부	인입부 산마루 측구 설치 및 절취 오폐수 처리장 설치
04월10일 (일)	휴일	- 작업구1 (환기구#1)	작업없음	******	******** ******** ********
		- 작업구2 (환기구#2)	작업없음
		- 인입선 종점부	개착 1단사면 발파암 깎기 및 사면보강
04월11일 (월)	야간	- 작업구1 (환기구#1)	단선터널 상선, 하선 굴진	******	********
		- 작업구2 (환기구#2)	종점부 굴진, 시점부 암반청소 시점부 중앙배수관 및 바닥 미굴부깨기
		- 인입선 종점부	인입부 종점부 굴진

작업일	휴일 형태	작업위치	작업내용	관리자
				감리단	시공사
04월12일 (화)	야간	- 작업구1 (환기구#1)	단선터널 상선, 하선 굴진	******	********
		- 작업구2 (환기구#2)	종점부 굴진, 시점부 암반청소 시점부 중앙배수관 및 바닥 미굴부깨기
		- 인입선 종점부	인입부 종점부 굴진
04월13일 (수)	야간	- 작업구1 (환기구#1)	단선터널 상선, 하선 굴진	******	********
		- 작업구2 (환기구#2)	종점부 굴진, 시점부 암반청소 시점부 중앙배수관 및 바닥 미굴부깨기
		- 인입선 종점부	인입부 종점부 굴진
04월14일 (목)	야간	- 작업구1 (환기구#1)	단선터널 상선, 하선 굴진	******	********
		- 작업구2 (환기구#2)	종점부 굴진, 시점부 암반청소 시점부 중앙배수관 및 바닥 미굴부깨기
		- 인입선 종점부	인입부 종점부 굴진
04월15일 (금)	야간	- 작업구1 (환기구#1)	단선터널 상선, 하선 굴진	******	********
		- 작업구2 (환기구#2)	종점부 굴진, 시점부 암반청소 시점부 중앙배수관 및 바닥 미굴부깨기
		- 인입선 종점부	인입부 종점부 굴진
04월16일 (토)	휴무일	- 작업구1 (환기구#1)	단선터널 상선, 하선 굴진	******	******** ******** ******** ******** ********
		- 작업구2 (환기구#2)	종점부 굴진, 시점부 암반청소 시점부 중앙배수관 부설 및 골재포설
		- 인입선 종점부	인입부 종점부 굴진
04월17일 (일)	휴일	- 작업구1 (환기구#1)	작업없음	-	******** ******** ********
		- 작업구2 (환기구#2)	작업없음
		- 인입선 종점부	작업없음
04월18일 (월)	야간	- 작업구1 (환기구#1)	단선터널 상선, 하선 굴진	******	********
		- 작업구2 (환기구#2)	종점부 굴진, 시점부 암반청소 시점부 중앙배수관 및 바닥 미굴부깨기
		- 인입선 종점부	인입부 종점부 굴진
04월19일 (화)	야간	- 작업구1 (환기구#1)	단선터널 상선, 하선 굴진	******	********
		- 작업구2 (환기구#2)	종점부 굴진, 시점부 암반청소 시점부 중앙배수관 및 바닥 미굴부깨기
		- 인입선 종점부	인입부 종점부 굴진

작업일	휴일 형태	작업위치	작업내용	관리자
				감리단	시공사
04월20일 (수)	야간	- 작업구1 (환기구#1)	단선터널 상선, 하선 굴진	******	********
		- 작업구2 (환기구#2)	종점부 굴진, 시점부 암반청소 시점부 중앙배수관 및 바닥 미굴부깨기
		- 인입선 종점부	인입부 종점부 굴진
04월21일 (목)	야간	- 작업구1 (환기구#1)	단선터널 상선, 하선 굴진	******	********
		- 작업구2 (환기구#2)	종점부 굴진, 시점부 암반청소 시점부 중앙배수관 및 바닥 미굴부깨기
		- 인입선 종점부	인입부 종점부 굴진
04월22일 (금)	야간	- 작업구1 (환기구#1)	단선터널 상선, 하선 굴진	******	********
		- 작업구2 (환기구#2)	종점부 굴진, 시점부 암반청소 시점부 중앙배수관 및 바닥 미굴부깨기
		- 인입선 종점부	인입부 종점부 굴진
04월23일 (토)	휴무일	- 작업구1 (환기구#1)	단선터널 상선, 하선 굴진	******	******** ******** ******** ******** ********
		- 작업구2 (환기구#2)	종점부 굴진, 시점부 암반청소 시점부 중앙배수관 부설 및 골재포설
		- 인입선 종점부	인입부 종점부 굴진
04월24일 (일)	휴일	- 작업구1 (환기구#1)	작업없음	-	******** ******** ******** ********
		- 작업구2 (환기구#2)	작업없음
		- 인입선 종점부	작업없음
04월25일 (월)	야간	- 작업구1 (환기구#1)	단선터널 상선, 하선 굴진	******	********
		- 작업구2 (환기구#2)	종점부 굴진, 시점부 암반청소 시점부 중앙배수관 부설 및 골재포설
		- 인입선 종점부	인입부 종점부 굴진
04월26일 (화)	야간	- 작업구1 (환기구#1)	단선터널 상선, 하선 굴진	******	********
		- 작업구2 (환기구#2)	종점부 굴진, 시점부 암반청소 시점부 중앙배수관 부설 및 골재포설
		- 인입선 종점부	인입부 종점부 굴진
04월27일 (수)	야간	- 작업구1 (환기구#1)	단선터널 상선, 하선 굴진	******	********
		- 작업구2 (환기구#2)	종점부 굴진, 시점부 암반청소 시점부 중앙배수관 부설 및 골재포설
		- 인입선 종점부	인입부 종점부 굴진

작업일	휴일 형태	작업위치	작업내용	관리자
				감리단	시공사
04월28일 (목)	야간	- 작업구1 (환기구#1)	단선터널 상선, 하선 굴진	******	********
		- 작업구2 (환기구#2)	종점부 굴진, 시점부 암반청소 시점부 중앙배수관 부설 및 골재포설
		- 인입선 종점부	인입부 종점부 굴진
04월29일 (금)	야간	- 작업구1 (환기구#1)	단선터널 상선, 하선 굴진	******	********
		- 작업구2 (환기구#2)	종점부 굴진, 시점부 암반청소 시점부 중앙배수관 부설 및 골재포설
		- 인입선 종점부	인입부 종점부 굴진
04월30일 (토)	휴무일	- 작업구1 (환기구#1)	단선터널 상선, 하선 굴진	*******	******** ******** ******** ******** ********
		- 작업구2 (환기구#2)	종점부 굴진, 시점부 암반청소 시점부 중앙배수관 부설 및 골재포설
		- 인입선 종점부	인입부 종점부 굴진

ㅇ 작업 사유 : 공사의 연속성 확보 및 예정 공정 추진

- 휴무일(토요일) 작업에 대해 대체 휴무 실시, 휴일(일요일 및 공휴일) 작업에 대한 추가 비용은 시공사 부담

□ 건설사업관리단 검토의견

ㅇ 작업의 연속성 확보와 원활한 공정추진을 위해 휴일작업 시행이 필요함에 따라 관련규정 『서울특별시 공사계약 특수조건 11조(휴일 및 야간작업)』에 의거 귀책사유가 시공사에 있어 건설사업관리대가는 시공사 부담이 타당함.

ㅇ 또한, 시공사에서 요청한 휴일작업 시행에 따른 공사관리의 공백이 발생하지 않도록 평일과 동일하게 건설사업관리업무를 수행함이 적정하다고 판단됨.

□ 조치계획

ㅇ 상기 건설사업관리단의 검토의견이 적정하다고 판단됨에 따라 아래와 같은 조건으로 ‘22년 4월 휴일 및 야간 작업계획에 대해 승인하고, 작업내용 등 변경사항 발생 시 사전 보고 후 시행토록 조치하고자 함.

	승 인 조 건
중대재해처벌법 시행에 따라 산업재해 예방을 위한 자율점검표, 산재예방 매뉴얼 등을 적극 활용하여 先안전, 後작업 이행 철저 - 위험성평가 실시 후 위험성 감소대책 이행철저 - 코로나 19 확산 방지를 위한 건설공사장 대응지침 시행 철저 - 야간근무는 주․야간으로 산출된 공사비에 의거 건설사업관리대가를 산출하였으므로 추가 지급 제외 - 휴일 작업에 따른 건설사업관리비는 시공사 부담 - 휴무일 작업에 따른 건설사업관리단 근무자는 대체휴무 실시 - 작업 시 시공사 현장 책임자는 관리자급으로 지정하고, 근무조 편성은 반드시안전관리자를 포함하여 근무하도록 하여 안전사고예방 관리 철저 - 근로자 보호 기본사항 10대 항목 및 안전시공 기본사항 10대 항목을 준수하고 안전사고 발생 시 경미한 사항이라도 즉시 보고 - 작업 시 신호수 배치, 통행로 확보를 철저히 하여 시민 불편사항 최소화 - 화재예방을 위해 지정장소외 흡연금지, 위험물 보관소 및 가스용기 관리 철저 - 건설기계 · 장비 또는 중량물 취급 작업시 건설사업관리기술자 확인 및 안전수칙 준수 철저 - 재난 대비 관련 안전사고가 발생하지 않도록 현장관리 철저 해빙기 대비 근로자 안전대책 이행 철저

붙임: 관련 공문 1부.  끝.