문서번호	도시철도토목부-20707
결재일자	2022. 4. 8.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		토목2과장	도시철도토목부장
장대성		권순환	04/08
			최병훈
협 조
	주무관			김봉성

「진접선(4호선연장) 차량기지 1공구 건설공사」

현장 발생암 매각처리 변경 계약 검토

2022. 4

도시기반시설본부

(도시철도토목부)

「진접선(4호선연장) 차량기지 1공구 건설공사」

현장 발생암 매각처리 변경 계약 검토

건설사업관리단으로부터 제출된 “현장 발생암 매각 변경계약 승인 요청”건에 대한 검토보고 임.

※ 관련서류 : 동명감 진접1 제2022-140호(’22.04.07)

□ 관련근거

ㅇ 건설기술진흥법 시행령 제77조(공사의 관리)

ㅇ 실시설계보고서 5.3.5 (3) 토공유용 및 암버력 활용계획

- 토사 및 풍화암은 2공구로 유용하고, 연·경암에 대해서는 암매각

□ 사업개요

ㅇ 공 사 명 : 진접선(4호선연장) 차량기지 1공구(인입선) 건설공사

ㅇ 공사금액 : 98,450백만원 (4차공사 10,709백만원)

ㅇ 공사기간 : ’18.12.31.∼ ’24.10.29. (4차공사 ’22.1.1.∼’22.12.31.)

ㅇ 규    모 : 인입선(L=5,556m), 차량기지 113m

ㅇ 도 급 자 : ㈜케이씨씨건설

□ 추진경위

ㅇ ’20.02.20. : 현장 발생암 매각방안 승인(본부)

ㅇ ’20.03.06. : 토석매각 입찰

ㅇ ’20.03.18. : 현장 발생암 매각 입찰결과 승인(본부)

ㅇ ’20.03.25. : 발생암 매각 계약 체결((주)삼표산업, 흥국산업(주))

ㅇ ’21.10.22. : 발생암 매각 계약 변경계약(1차)

- 업체간 상호 물량 조정 (*******************************************)

□ 건설사업관리단 보고내용

ㅇ 변경 사유

- 현장의 원활한 공사추진을 위해 실반출량 및 계약잔량을 고려하여 매각 업체간 물량 변경 합의에 따른 변경계약 시행 필요

※ 현장설명서(발생암 매각) 입찰조건 제30항에 의거, 발생암 매각업체는 입찰결과의 권리양도시 발주자의 사전 서면승인 필요

ㅇ 계약 현황

구 분	계약물량(㎥)	실반출량(㎥) (‘22.04.04기준)	잔 량	비 고
㈜삼표산업	*******	*******	*
흥국산업㈜	*******	******	*******
합 계	*******	*******	*******

※ 흥국산업 반출량이 적어 현장 내 임시야적공간 부족 발생

ㅇ 변경 계획

구 분		당 초	변 경	증 ․ 감	비 고
㈜삼표산업	물량(㎥)	*******	*******	***********	**** ********
	금액(천원)	*********	*********	***********
흥국산업㈜	물량(㎥)	*******	******	***********	**** ********
	금액(천원)	*******	*******	***********
합 계	물 량	*******	*******	*
	금 액	*********	*********	*

※ 업체간 협의완료('22.03.10)

ㅇ 건설사업관리단 검토의견

- 원활한 발생암 매각을 통한 현장내 임시야적공간 확보 및 현장 공정 추진을 위해 암매각 업체간 계약물량을 조정하여 변경계약을 시행하는 것이 적정한 것으로 판단됨.

□ 조치의견

ㅇ 발생암 매각 변경계약 요청건에 대해 검토한 결과 건설사업관리단 보고내용이 적정한 것으로 판단되므로 원안대로 승인 조치하고 향후 설계변경 시 정산·반영코져 함.

붙 임 : 건설사업관리단 공문 1부.  끝.