문서번호	도시철도토목부-21306
결재일자	2022. 4. 22.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

			시 민
주무관		궤도과장	도시철도토목부장
조태현		이승우	04/22
			代권순환
협조

「별내선(8호선연장) 1,2공구 궤도공사」

휴일 작업계획 승인 검토보고

2022. 4.

도시기반시설본부

(도시철도토목부)

『별내선(8호선연장) 1,2공구 궤도공사』

휴일 작업계획 승인 검토보고

『별내선(8호선연장) 1,2공구 궤도공사』와 관련, 건설사업관리단으로부터 `22년 4월 건설사업관리기술인 휴일작업 계획 승인 요청이 있어 검토 후 아래와 같이 보고 드림.

□ 휴일 작업계획

○ 근거: 유신궤감(별내) 제2022-61호(2022.04.21.)

○ 근무 사유

- 궤도자재(레일 등) 투입관련 노반 2공구(ES1 환기구) 사용기간 협의에 따라 4.20(수)~5.10(화)가지 궤도자재 투입완료 필요

- 궤도공정 준수를 위하여 레일 투입이 선행되어 레일 용접공사와 병행작업으로 추가 공기를 확보

- 작업의 연속성 확보 및 원활한 공정추진을 위해 휴일에도 지속적 공사추진 시행 필요

○ 근무계획

- 토요일: 2일 [04/23(토), 04/30(토)] → 대체휴무 실시

○ 세부내용

작 업 일	작 업 내 용	관리자
		건설사업 관리단	시공사
04월23일(토)	본선 ES1 환기구 - 레일투입(60kg, L=20m)	******	****** ****** ****** ****** ****** ****** ******
04월30일(토)	본선 ES1 환기구 - 레일투입(60kg, L=20m)	******	****** ****** ****** ****** ****** ****** ******

○ 대체 근무계획

구 분	근무일자	근무시간	근 무 자	대체 휴무계획		비 고
				대체 휴무일	업무대행자
휴일작업	04월23일(토)	08:00 ~ 17:00	******	04월29일(금)	******
	04월30일(토)	08:00 ~ 17:00	******	05월06일(금)	******

○ 건설사업관리단 검토의견

- 궤도자재(레일 등) 투입관련 노반 2공구 사용기간 협의에 따라 4.20(수)~5.10(화)까지 궤도자재 투입을 완료하여야 하며,

- 궤도공정 준수를 위하여 레일 투입 및 레일 용접공사를 병행하여 추가 공기를 확보하고, 작업의 연속성 및 원활한 공정추진을 위해 시공사에서 요청한 휴일작업 시행에 따른 공사관리의 공백이 발생치 않도록 평일과 동일하게 건설사업관리업무를 수행함이 적정하다고 판단되며,

- 건설사업관리단의 대체휴무는 업무대행자를 지정하여 용역수행에 차질이 없도록 만전을 기하겠음.

□ 검토결과

	관 련 근 거
▶ 서울특별시 공사계약특수조건 제11조(휴일 및 야간작업) ▶ 공사시방서 제2장 1.3(부진공정만회 대책) (2).②.(작업시간 연장) ▶ 건설사업관리용역 과업내용서 5(공정관련 건설사업관리업무)

○ 휴일근무 검토결과: 적정

- 작업의 연속성 확보와 원활한 공정추진을 위해 휴일에도 공사 추진

○ 개정된 근로기준법에 따른 주간 적정 근로시간(52시간) 준수: 적정

□ 조치계획

○ 작업의 연속성과 원활한 공정추진을 위하여 아래와 같이 휴일 작업 승인조건을 부여하고, 건설사업관리기술인 근무계획을 승인하고자 함.

	승인조건
□ 휴일작업에 소요되는 건설사업관리기술인 대가는 시공사에서 부담 □ 휴일작업시 시공사 현장책임자는 현장 관리자급으로 지정하고, 근무조편성은 반드시 안전관리자 포함 근무토록하여 안전관리 철저 □ 휴일작업 시행전 세부 작업계획을 수립하고 공사관리의 공백이 없도록 공사 관리자는 작업장에 상주 정위치에서 근무하도록 감독할 것 □ 건설공사장 안전사고 예방 중점관리 20대 항목 준수 철저 □ 코로나19 예방 및 확산 방지를 위한 현장 안전관리 철저 ※ 코로나19 예방 및 확산 방지를 위한 사업장 대응지침 이행

붙임: 별내선(8호선연장) 궤도공사 휴일작업계획 승인요청서(4월) 1부.  끝.