“아리수는 오늘도 당신의 삶과 함께 합니다!”
	상수도사업본부
수신	재무회계과장
(경유)
제목	변경 계약의뢰(미아배수지 기본 및 실시설계용역)

우리부서에서 추진 중인 미아배수지 기본 및 실시설계용역에 대하여 계약기간 연장을 위해 변경계약 의뢰하오니 처리하여 주시기 바랍니다.

가. 용  역  명 : 미아배수지 기본 및 실시설계용역

- 용역 업체 : **************

- 계약 금액 : ************

- 계약 일자 : 2021. 4. 27.

- 용역 기간 : 당초 2021. 5. 4. ~ 2022. 5. 3.

변경 2021. 5. 4. ~ 2022. 11.30.

- 용역기간 변경 사유 : *******************************************************

- 연기사유 귀책사유 : 서울시 상수도사업본부

- 지체상금 부과 여부 : 미부과. 끝.

따로붙임 : 1. 방침서 1부.

2. 공문 및 합의각서 1부. 끝.

	계 획 설 계 과 장
주무관	신정우		계획설계과장	04/27
송헌영
협조자
시행	계획설계과-20894	(	2022.04.27	)	접수		(		)
우	03741	서울특별시 서대문구 서소문로 51 (합동)	/	https://arisu.seoul.go.kr/
전화	02-3146-1413	/전송	3146-1429	/	sjwoo67@seoul.go.kr	/	부분공개(5)