문서번호	도시철도토목부-22106
결재일자	2022. 5. 13.
공개여부	부분공개(7)
방침번호

			시 민
주무관		궤도과장	도시철도토목부장
조태현		이승우	05/13
			최병훈
협조

「별내선(8호선연장) 1,2공구 궤도공사」

관급자재(철근) 규격 변경 검토 보고

2022. 5.

도시기반시설본부

(도시철도토목부)

『별내선(8호선연장) 1,2공구 궤도공사』

관급자재(철근) 규격 변경 검토보고

『별내선(8호선연장) 1,2공구 궤도공사』와 관련하여 관급자재(철근) 수급 지연에 따른 규격 변경 요청이 있어 이에 대하여 검토하고 보고드림.

※관련근거: 관급자재(철근) 규격 변경에 대한 실정보고〔유신궤감(별내) 제2022-82, 2022.5.12〕

1		공 사 개 요

□ 공 사 명: 별내선(8호선연장) 1,2공구 궤도공사

□ 규    모: 궤도부설 L=9.121km(콘크리트 7.6.km, 자갈 1.521km)

분기기 10틀

□ 공사기간 및 계약금액

(단위 : 원)

구분	공사기간	계약금액	비고
총 차	2021.12.01.~2022.11.30.	5,155,253,830
1 차	2021.12.01.~2022.02.28.	21,066,910	준공
2 차(금회)	2022.03.01.~2022.11.30.	5,134,186,920	진행중

□ 시 공 사: 삼표레일웨이(주)

□ 감 리 단: (주)유신 외 1개사

2		철근구매 추진경위

□ `22.01.24.: 관급자재(철근) 구매요청

□ `22.02.04.: 분할납품요구서(철근) 배정

연번	물품식별번호	품 명	규 격	단위	수량	단 가	금 액	납품기한
1	20160898	이형철근	SD300 D10mm	ton	3.803	1,071,400	4,074,534	'22.3.25.
2	20160900	이형철근	SD300 D16mm	ton	50.082	1,054,900	52,831,501
3	10063870	이형철근	SD400 HD25mm	ton	5.64	1,021,900	5,763,516
소 계							62,669,550
조달수수료(0.54%, 7.6원 절사)							304,570
합 계							62,974,120

□ `22.03.18.: 관급자재(철근) 납품기한 연기 요청

- 변경사유: 노반 인수인계 지연으로 인한 궤도공사 착수일정 변경

- 당초 : '22.3.15. → 변경 : '22.5.31.

□ `22.03.29.: 분할납품요구서(철근) 배정

계약내용(기타사항)

- 최근, 건설경기 호조로 아파트 물량 증가와 철근 수요는 급증하는데 반해, 원자재 단가 및 중국산 철근 수입량 감소 등으로 가격은 폭등하여 공급량은 충분하지 못한 실정입니다.

- 이에 따라 귀 기관에서 조달요청하신 철근이 제때 공급이 안되는 경우가 발생할 수 있으니, 완공이 임박한 공사 현장 등 긴급한 수요물량에 대해서는 철근 납품지연에 따른 피해를 최소화 할 수 있도록 구매방법 변경, 공기연장 등 적절한 조치를 취하시기 바랍니다.

3		보 고 사 항

□ 변경 사유

∎ **************************************************************************************************************************

∎ ***********************************************************************************

구분		당 초			변 경			증·감
		수량	단가	금액	수량	단가	금액
이형철근	SD300 D10	3.803	1,071,400	4,074,534				△ 293,363
	SD400 HD10				3.803	1,148,540	4,367,897
	SD300 D16	50.082	1,054,900	52,831,501				△4,415,730
	SD400 HD16				50.082	1,143,070	57,247,231
	SD400 HD25	5.64	1,021,900	5,763,516				△ 683,398
	SD400 HD25				5.64	1,143,070	6,446,914
소 계				62,669,550			68,062,042	△5,392,492
조달수수료(0.54%)				304,570			367,528	△ 62,958
합 계				62,974,120			68,429,570	△5,455,450

□ 원설계사 검토의견

∎ 도상 내 철근(D10mm, D16mm)은 구조용 철근이 아닌 전식방지용 철근(그림 8-19참조, 별내선 궤도보고서 발췌)으로 철근 항복강도에 큰 영향이 없음으로 철근 규격변경(SD300→SD400)시에도 큰 문제가 없을 것으로 판단되므로 공기에 지장이 없도록 시공하기 바람.

□ 기술지원기술인 검토의견

∎ 도상 내 철근(D10mm, D16mm)은 구조용 철근이 아닌 전식방지용 철근으로 철근 항복강도에 큰 영향이 없을 것으로 판단되어, 원설계사 검토의견에 이의 없음.

4		건설사업관리단 검토의견

□ ******************************************************************************************************

□ 구조용이 아닌 전식방식용 철근이므로 항복강도에 영향이 없으므로 공기에 지장이 없도록 변경하는 것은 적정하다고 판단됨.

5		검 토 결 과

□ 상기 건설사업관리단에서 제출한 실정보고 검토의견이 적정하다고 판단되므로 별내선(8호선연장) 1,2공구 궤도공사의 사업 및 공정 업무 등의 원활한 추진을 위해 "관급자재(철근) 규격 변경" 계약을 시행하여 공사 관리에 만전을 기하고자 함.

∎ 관급자재(철근) : 68,429,570원(증 5,455,450원)

∎ 예산과목

- 광역철도건설(광역교통시설특별회계), 광역철도건설사업(광역교통시설특별회계), 별내선(8호선연장) 광역철도건설(광역교통시설특별회계), 시설비및부대비, 시설비(자체재원) - 2022년 본예산

붙임  1. 건설사업관리단 실정보고 1부.

2. 관련문서 1부.  끝.