문서번호	도시철도토목부-22323
결재일자	2022. 5. 18.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		토목2과장	도시철도토목부장
장대성		권순환	05/18
			최병훈
협 조
	주무관			김봉성

「진접선(4호선연장) 차량기지 1공구 건설공사」

터널공사 우선시공 추진계획 검토 보고

2022. 5

도시기반시설본부

(도시철도토목부)

「진접선(4호선연장) 차량기지 1공구 건설공사」

터널공사 우선시공 추진계획 검토 보고

건설사업관리단으로부터 제출된 “터널공사 우선시공 승인 요청”건에 대한 검토보고임.

※ 관련서류 : 동명감 진접1 제2022-198호(’22.05.10)

□ 관련근거

ㅇ 공사계약일반조건 제6절(공사 설계의 변경)의 1. 다

- 계약담당자는 공정 이행의 지연으로 품질 저하가 우려되는 등 긴급하게 공사를 수행할 필요가 있는 때에는 계약상대자와 협의하여 설계변경의 시기 등을 명확히 정하고, 설계변경을 완료하기 전에 우선시공 가능

□ 사업개요

ㅇ 공 사 명 : 진접선(4호선연장) 차량기지 1공구(인입선) 건설공사

ㅇ 공사금액 : 98,450백만원 (4차공사 10,709백만원)

ㅇ 공사기간 : ’18.12.31.∼ ’24.10.29.(4차공사 ’22.1.1.∼’22.12.31.)

ㅇ 규    모 : 인입선(L=5,556m), 차량기지 113m

ㅇ 도 급 자 : ㈜케이씨씨건설

□ 추진현황

ㅇ ’22.01.01 : 4차 공사 착수

ㅇ ’22.05.06 : 단선 및 복선 굴착 진행 중

구 분	단위	4차 계약수량(A)	기시행(B) (~’22.05)	잔 여(A-B)	완료 예정일
단선(상선)	m	257.4	195.0	71.4	6/24
단선(하선)	m	284.2	262.0	27.6	6/16
복선(작업구2)	m	347.0	330.0	17.0	5/19
복선(작업구3)	m	137.2	6.0	131.2	9/30

□ 건설사업관리단 보고내용

ㅇ 우선시공 사유

- 4차공사 계약물량이 2022년 6월~7월경 소진이 예상됨에 따라 중단없는 공사시행을 위해 우선 시공 필요

ㅇ 우선시공 구간 현황

구 간	당 초	변 경	증 · 감
단선터널(상선)	257.4M (0km 178.0 ~ 0km 435.4)	325.8M (0km 109.6 ~ 0km 435.4)	증) 68.4M
단선터널(하선)	284.2M (0km 280.0 ~ 0km 564.2)	370.2M (0km 194.0 ~ 0km 564.2)	증) 86.0M
복선터널(작업구2)	347.0M (3km 096.0 ~ 3km 443.0)	844.0M (3km 096.0 ~ 3km 940.0)	증) 497.0M
복선터널(작업구3)	137.2M (4km 734.0 ~ 4km 871.2)	315.2M (4km 556.0 ~ 4km 871.2)	증) 178.0M

ㅇ 우선시공 구간 소요 공사비

(단위:백만원)

공 종	단위	수 량	금 액	비 고
단선터널 굴착	㎥	6,532	*****	상선 : 68.4m 하선 : 86.0m
복선터널 굴착	㎥	51,766	*****	작업구2 : 497.0m 작업구3 : 178.0m
직접공사비계			*****
간접공사비 外	식	1	***
공급가액			*****

ㅇ 우선시공 구간 현황도

구 분	현 황 도
작업구1	0km564.2 0km109.6 0km435.4 0km178.0 0km280.0 0km194.0 (당초)단선(상선) 257.4m (변경)단선(상선) 325.8m 증) 68.4m (당초)단선(하선) 284.2m (변경)단선(하선) 370.2m 증) 86.0m
작업구2,3	3km443.0 3km096.0 3km940.0 4km734.0 (당초)복선(작업구2) 347.0m (변경)복선(작업구2) 844.0m 증) 497m 4km871.2 4km556.0 (당초)복선(작업구3) 137.2m (변경)복선(작업구3) 315.2m 증)178m

ㅇ 건설사업관리단 검토의견

- 터널 4차공사 계약물량이 2022년 6월 ~ 7월 경에 소진될 것으로 예상되며, 2024년 10월 준공일정 준수를 위해 터널 우선공사 시행은 적정하다고 판단됨.

□ 조치의견

ㅇ 건설사업관리단의 “터널공사 우선시공 승인 요청”건에 대해 검토한 결과 적정한 것으로 판단되므로 승인 통보

ㅇ 우선시공 추진에 따라 안전 및 품질관리에 만전을 기하도록 조치하고 우선시공 부분에 대해서는 4차공사에 반영

붙 임 : 건설사업관리단 공문 1부.  끝.