문서번호	의정담당관-22494
결재일자	2022. 5. 18.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		시설관리팀장	의정담당관
강성수		이승준	05/18
			代황동연
협조

「시의회 본관 냉난방기 교체 부대공사」 설계변경 보고

2022.  4.

시의회사무처

(의정담당관)

「시의회 본관 냉난방기 교체 부대공사」 설계변경 보고

「시의회 본관 냉난방기 교체 부대공사」관련하여 현장 여건에 따른 공사내역 변경이 있어 설계변경을 시행하고자 보고 드림.

□ 공사개요

○ 공 사 명 : 시의회 본관 냉난방기 교체 부대공사

○ 계약금액 : 금6,924,800원정(금육백구십이만사천팔백원)

○ 공사기간 : 2022.04.28.~2022.05.24.

○ 시 공 사 : ㈜부강에프앤지(대표 백종득)

□ 설계변경 내용

○ 1층 로비용 실외기를 철재 받침대를 별도 제작하여 냉각탑 냉각수 배관 상부로 설치하고자 하였으나 현장여건과 시공사 요청 반영하여 실외기 받침대를 별도 제작하지 않고 2층 옥상바닥에 직접설치

□ 설계변경(정산)

○ 설계변경 내용

공 종	설계변경 내용	증·감	비고
실외기 받침대 제작	설치물량 감소(1식→0식)	감)846,200원

○ 계약금액 변경

당초계약금액	변경계약금액	비고(증·감)
금6,924,800원	금6,078,600원	감)금846,200원

○ 예산과목: 의회청사개선, 의회청사 시설개선, 시설비(401-01)

□ 향후일정

○ 2022.5.23. 설계변경 계약

○ 2022.5.24. 공사준공

붙임  1. 설계변경 내역서 1부.

2. 합의각서 1부.