투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
		서울특별시도시기반시설본부
수신	내부결재
(경유)
제목	업무지시전(물가변동으로 계약금액 조정(5회) 검토 보완 요청)

1.업무지시현장 : 진접선(4호선연장) 차량기지 1공구(인입선) 건설공사 주식회사 동명기

술공단종합건축사사무소

2.작 성 일 자 : 2022-05-18 13:05:09

3.지 시 내 용

1) 동명감 진접1 제2022-204호(2022.05.17) 관련입니다.

2) 귀 사업단에서 제출한 "물가변동으로 계약금액 조정(5회) 검토보고" 관련 다음사항에 대해 보완 요청하오니 조치하여 주시기 바랍니다.

○ 보완 요청사항

- 실비 정산항목 물가변동 제외 검토

보험료 등 실비 정산항목에 대한 물가변동 제외 여부 검토

- 물가변동 제외 수량 검토

예정공정, 실행공정, 기성공정 대비 최대 공사물량 적용 여부 검토

- 계약공정률, 실행공정률, 기성공정률 비교 검토.  끝.

주무관	장대성		토목2과장	05/18
권순환
협조자
시행	도시철도토목부-22322	(	2022.05.18	)	접수		(		)
우	04520	서울특별시 중구 청계천로 8 프리미어플레이스 9층	/	https://www.seoul.go.kr
전화	02)772-7237	/전송	02)772-7306	/	stress76@seoul.go.kr	/	대시민공개