준공기한 연기보고서(개량-211)

문서번호	급수운영과-23559
수 신 자	내부결재
접수번호

결재	주무관	급수운영팀장	급수운영과장
	유미진	김용만	김원수

“2021년 서대문구 관내 상수도공사”의 작업지시 건에 대하여 아래와 같이 준공기한을 연기하고자 아래와 같이 보고합니다.

2022. 5. 23.

복명자: 지방시설서기보  성명: 유 미 진

복     명     내     용

건  명

준공기한 연기보고서***********

내용

공사개요

작업지시번호	공사위치	신 청 인
******	*********	***

2. 보고내용

- 보호통 뚜껑이 담장 밑에 일부 겹쳐 뚜껑이 열리지 않은 상태, 설비업체 복구  필요하여 준공기한 내 작업이 불가한 실정으로 공사연기원 제출.

3. 조치의견

- 상기 사유로 인해 준공기한을 아래와 같이 연기하고자 합니다.

작업지시번호	공사위치	당초공사기간	변경공사기간
******	*********	**************************	**************************

4. 지체상금 부과여부: 미부과

붙임  공사연기원 1부.  끝.