문서번호	시설보수과-21479
결재일자	2022. 5. 24.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		시설보수과장	성동도로사업소장
김수천		김시련	05/24
			이경우
협 조
	주무관			유진석

용역과업 일시중지 검토보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2022.5.24.

성동도로사업소

(시설보수과)

용역과업 일시중지 검토보고

용 역 명	용역기간	과업중지대상시설물
청계천복개구조물(좌안) 등3개소 도로시설물 정밀안전점검	2022.3.8~2022.12.2	청계천(좌안)복개구조물
면목천복개구조물 등3개소 도로시설물 정밀안전점검	2022.3.16~2022.12.10	면목천복개구조물

우리사업소에서 진행중인 정밀안전점검 용역과 관련하여 수방기간중 국지성 돌발강우시 긴급대피시설이 부족한 복개구조물에 대하여  정밀안전점검용역 과업수행을 일시중지하여 안전사고예방에 만전을 기하고자 함.

1		대상시설물

2		과업 중지 사유

❍ 수방기간(2022.5.15~10.15)중 국지성 돌발강우로 인해 안전사고가 자주

발생하고 있어 우리사업소에서 시행중에 있는 도로시설물정밀안전점검

용역중 긴급대피시설이 부족한 복개구조믈 대하여 일시 과업중지 하고자 함.

❍ 과업 중지기간 : 2022. 6. 1. ~ 2022. 8. 31.(3개월)

❍ 지체상금 부과여부 : 미부과

3		조치의견

❍ 상기 보고내용과 같이 해당 시설물에 대한 과업을 일시중지하고 추후 부족한 기간에 대한 준공기한을 연기하여 안전사고 예방 및 용역업무 수행에 만전을 기하고자 함.  끝.