문서번호	시설과-20988
결재일자	2022. 6. 9.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관	공원조성팀장	시설과장	중부공원녹지사업소장
김인표	이종무	권종화	06/09
			김인숙
협 조
	공원운영팀장		정영미

남측순환로 교통운영개선방안 실시설계 용역 추진 계획

2022. 6.

중부공원녹지사업소

(시   설   과)

자전거 안전사고가 빈번히 발생하는 남측순환로 내리막길 일대 사고저감 등 효과적인 교통운영개선 체계 도입을 위한 설계용역을 아래와 같이 추진코자 합니다.

남측순환로 교통운영개선방안 실시설계 용역 추진 계획

□ 추진근거

ㅇ 남산공원 남측순환로 자전거 안전운행 강화를 위한 협조 요청

: 공원운영과-23711(2022.05.25.)호

□ 용역개요

ㅇ 용역 필요성

- 남측순환로는 내리막길과 급커브로 이루어져 안전한 교통운행을 위해 안내시설, 현수막 등의 안전체계를 구축함에도 자전거 이용객들의 사고가 발생하여 교통 전문 분야의 과업 수행을 통해 효과적인 개선 방안을 도출하고자 함.

ㅇ 용 역 명 : 남측순환로 교통운영개선방안 설계 용역

ㅇ 대 상 지 : 남산 남측순환로(서울 용산구 남산공원길 105), L=1.5km

ㅇ 과업기간 : 착수일로부터 50일 이내

ㅇ 용 역 비 : **********************

ㅇ 계약방법 : **********

ㅇ 과업내용

- 교통운영개선을 위한 현황조사, 기본구상, 대안설정

- 공사시행을 위한 표준시방서, 단가 산출, 설계도서 작성

□ 향후일정

ㅇ 2022.06.09.  : 계획 수립 및 기술용역타당성 심사 의뢰

ㅇ 2022.06.15.  : 용역 발주

ㅇ 2022.06.말   : 중간보고회 및 전문가 현장자문(기간 중 1일)

ㅇ 2022.07.중순 : 최종보고회

ㅇ 2022.07.말   : 용역 준공

- 설계도서 검수 및 용역 결과에 따른 후속조치 협의(공원운영과)

□ 위치도 및 현황사진

위 치 도
현황사진

끝.