“아리수는 오늘도 당신의 삶과 함께 합니다!”
	강남수도사업소
수신	행정지원과장
(경유)
제목	설계변경(4차-최종) 계약의뢰[(2021년 서초구 관내 상수도공사(장기계속단가계약)]

우리과에서 시행중인「2021년 서초구 관내 상수도공사(장기계속단가계약)」에 대하여 설계변경(4차-최종)을 시행하고 아래와 같이 계약의뢰하오니 처리하여 주시기 바랍니다.

가. 공 사 명: 2021년 서초구 관내 상수도공사(장기계속단가계약)

나. 계 약 자: *************

다. 공사기간: 2021. 06.21. ~ 2022. 06.30.

라. 설계변경 금액

(단위:원)

구 분	당 초	변 경	증․감	비 고
도 급 액	***********	***********	*********

마. 설계변경 사유: 계약 물량 증․감 및 신규 공종 발생

- 계약물량 증가: 잔토처리(0.7 상차비 별도)24DT, 집하장 → 사토장(50km)등 138개 공종

- 계약물량 감소: 투수콘 포장절단(지세할증) 등 154개 공종

- 신규공종: 단수천공분기점분기(80/25~30mm)등 3개 공종

바. 예산과목

- 상수도사업비, 영업비용, 급,배수공사비, 신설공사비

- 상수도사업비, 영업비용, 급수공사비, 개조공사비

- 상수도사업비, 영업비용, 배급수비, 수선교체비

- 자본적지출, 유형자산취득, 구축물, 시설비 및 부대비, 시설비

- 소방재난능력의 향상으로 안정적인 재난시스템 구축, 소방용수시설 등의 설치 및

관리, 일반회계, 소방용수시설 보수, 시설비

- 소방재난능력의 향상으로 안정적인 재난시스템 구축, 소방용수시설 등의 설치 및

관리, 일반회계, 소방용수시설 설치, 시설비

붙임: 설계변경(4차-최종)관련 서류 각 1부.  끝.

	시 설 관 리 과 장
주무관	박찬수		시설관리팀장	김재영		시설관리과장	06/10
김근태
협조자
시행	시설관리과-24447	(	2022.06.10	)	접수		(		)
우	06300	서울특별시 강남구 양재천로 199, 강남수도사업소(시설관리과)	/	http://arisu.seoul.go.kr
전화	02-3146-4909	/전송	02-3146-4939	/	mcl88@seoul.go.kr	/	부분공개(5)