“아리수는 오늘도 당신의 삶과 함께 합니다!”
	서부수도사업소
수신	수신자 참조
(경유)
제목	원인자이설공사 준공기한 연기신청에 따른 회신

1. 마포구 치수과-11704(2022. 6. 3.)호와 관련입니다.

2.『홍제천 망원나들목 설치공사』와 관련하여 준공기한 연기 신청을 2022. 10. 31.까지 조건부 승인하오니 아래와 같이 공사 준공까지 현장 관리에 만전을 기하여 주시기 바랍니다.

ㅇ 조건부 승인 사항

- 현재 퇴수관로 연결 시공만 남은 상황(90% 공사완료)으로 관로의 순환배관 형성 및 급수 안정을 위하여 조속히 공사가 마무리 될수 있도록 조치하여 주시기 바라며

- 건설사업기술자, 현장대리인 및 안전관리자는 반드시 현장에 상주하고, 보호구(안전모, 안전화 등)를 필히 착용하여 안전사고가 발생되지 않도록 시공관리에 철저를 기하여 주시기 바랍니다.  끝.

	서부수도사업소장
수신자	마포구청장 (치수과장), 태강산업개발(주)
주무관	조민성		급수관리팀장	박상열		급수운영과장	전결 06/14
代김용만
협조자
시행	급수운영과-24875	(	2022.06.14	)	접수		(		)
우	03635	서울특별시 서대문구 통일로26길 41, 급수운영과	/	http://arisu.seoul.go.kr
전화	02-3146-2168	/전송	02-3146-3689	/	wat0619@seoul.go.kr	/	부분공개(6)