문서번호	시설보수과-22772
결재일자	2022. 6. 22.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

	시 민
주무관	시설보수과장
민병하	06/22
	이화신

2022년 도로시설물 세척용역 작업지시(1차) 변경 보고

2022. 6.

북부도로사업소

[시설보수과]

『2022년 북부도로사업소 도로시설물 세척용역』

작업지시(1차) 변경 보고

□ 용역개요

○ 용 역 명 : 2022년 북부도로사업소 도로시설물 세축용역

○ 규    모 : 터널 8개소, 지하차도 8개소, 청계천교량 등 10개소

○ 기    간 : 2022. 5. 27. ~ 12.31.

○ 도 급 비 : 360,777천원

○ 도 급 자 : (유)클린시티씨스템  대표 허영철

□ 보고내용

○ 금번 1차 작업지시한 물량 중 청계천 교량(10개소) 하부 세척을 제외하고 작업이 완료되었으나,

○ 최근 사회적거리두기 완화 등으로 많은 시민들이 늦은 시간까지 청계천 일대에 모여 있어 교량 하부세척 작업이 불가함에 따라 일정 조정이 필요하며,

○ 작업완료 기간이 2022. 6. 20.까지로써 부득이하게 작업기간 변경이 필요한 실정임.

□ 검토 및 조치계획

○ 1차작업지시 기간을 아래와 같이 연장하고자 하며, 청계천 교량하부 세척은 시민불편 최소화 및 청결한 도로시설물 유지관리를 위해 유동인구가 가장 적은 2022년 6월 27일(월) 22시부터 시행하고자 함.

▷ 작업기간

- 당초 : 2022. 6. 4. ~ 6. 20.

- 변경 : 2022. 6. 4. ~ 7. 1.  끝.