문서번호	시설관리과-27820
결재일자	2022. 6. 23.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

			시 민
주무관		시설운영팀장	시설관리과장
천웅민		이유찬	06/23
			代이유찬
협 조
	주무관			김병주

공사 추가 작업지시 보고

(덕성여중 주변 외 6개소 장기사용 배급수관 정비공사)

2022.  6.

중부수도사업소

(시설관리과)

공사 추가 작업지시 보고

우리 사업소에서 시행중인 「덕성여중 주변 외 6개소 장기사용 배급수관 정비공사」 공사 시행 중 발생한 사항 및 추진 계획에 대해 아래와 같이 보고합니다.

□ 공사현황

ㅇ 공 사 명: 덕성여중 주변 외 6개소 장기사용 배급수관 정비공사

ㅇ 계 약 자: ***********

ㅇ 공사개요: *********************

ㅇ 공사시간: ****************************

ㅇ 계약금액: ************

ㅇ 감 독 청: 서울시설공단

□ 검토내용

ㅇ 상수도관 매설현황

<GIS 관망도>	<실제 공급현황(현장조사)>

ㅇ 주요내용

- 5구간(평창동 571-42~ 346-10번지)은 당초 평창2배수지 급수구역으로 예상하고 설계를 진행하였으나,

- 확인굴착 및 현장조사 결과, 평창2배수지 급수구역과 북악터널가압장 급수구역이 만나는 경계 지점으로 확인됨.

- 두 수계간의 수압차이로 인해 통수가 불가능한 상황임.

평창2배수지 급수구역	수압차	북악터널가압장 급수구역
수압 10.0kgf	5.4kgf	수압 4.6kgf

□ 조치의견

ㅇ 수질 문제 등에 대응하기 위해 두 수계 사이에 경계밸브 및 퇴수변(2개소) 설치공사를 시행하고, 설계변경시 반영.

ㅇ ****************************** 계약업체에 작업지시하여 시행코자 함.

ㅇ 추정공사비 : 약 5,000(천원) 증액 예상

ㅇ 상기와 같이 조치의견을 감독청인 서울시설공단 및 시공사(태성건설 대표 홍영인)에 통보하여 공사 시행에 만전을 기하고자 함. 끝.