문서번호	한옥정책과-22836
결재일자	2022. 6. 23.
공개여부	부분공개(7)
방침번호

			시 민
주무관		건축자산지원팀장	한옥정책과장
민흥기		최장길	06/23
			안중욱
협 조
	주무관			손정훈

2022년 상반기 서울 공공한옥

유지보수 공사 설계변경 검토보고

2022. 6.

균형발전본부

(한옥정책과)

2022년 상반기 서울 공공한옥 유지보수공사 설계변경 검토보고

2022년 상반기 서울 공공한옥 유지보수 공사 수량변경에 따른 내역변경 사항에 대하여 설계변경 처리 후 준공하고자 함.

□ 추진근거

○ 「지방자치단체 입찰 및 계약 집행기준」제13장 공사계약 일반조건 제7절 계약금액의 조정

○‘2022년 상반기 서울 공공한옥 유지보수공사 설계변경 요청건’                             [다한건축 20*******01호(2022.06.22.)]

□ 공사개요

○ 공 사 명 : 2022년 상반기 서울 공공한옥 유지보수공사

○ 공사기간 : 2022. 5. 30. ~ 6. 26.

○ 계약금액 : 금52,709,000원

○ 계약상대자 : 주식회사 다한건축 (대표 한민주)

□ 설계변경

○ 설계변경 사유

- 현장 여건에 따른 공사물량 변경

- 공공한옥 3개소 내역 변경

○ 설계변경 금액

(단위 : 원)

구분	변경 전 금액	변경 후 금액	증감액	비고
도 급 액	52,709,000	52,709,000	-	내역변경

○ 공공한옥별 변경 내용

위치	공사변경내용	변경사유	증감액 (순공사비)
금박연 (가회동 11-18	목재 대문 추가	조경쪽 기존 목재 대문의 부식으로 인하여 교체	증1,315,512원
홍건익가옥 (필운동 88-1)	창호지 바르기 삭제	운영팀에서 기 교체	감481,120원
서촌주민사랑방 (누하동 155-11)	계단 난간 손스침 해체·설치 삭제	운영팀에서 기 교체	감698,400원

○ 예산과목

- 한옥건축자산보전진흥, 전통문화계승발전(일반), 한옥지원센터 운영 및 공공한옥 조성사업, 시설비 및 부대비, 시설비

□ 조치의견

○ 계약 상대자가 제출한 물량변경 및 내역변경 내용이 적합하므로 승인 처리하고 설계변경 및 추후 준공 처리코자 함.

붙임  1. 설계 변경 공문 1부.

2. 변경내역서(6.23) 1부.

3. 합의각서 1부.  끝.