투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시도시기반시설본부
수신	총무부장
(경유)
제목	관급자재(방진재) 납품기한 연기 요청 - (별내선 궤도공사/총액)

우리 부서에서 시행중에 있는 『별내선(8호선연장) 1,2공구 궤도공사』에 소요되는 관급자재(방진재)의 납품기한을 아래와 같이 연기요청하오니 조치하여 주시기 바랍니다.

가. 건    명 : 별내선(8호선연장) 궤도공사(1,2공구) 관급자재 방진재 제작구매

나. 계약금액 : *************

다. 계 약 자 : **********

라. 변경사항

품 명	계약번호	규 격	수량	납 품 기 한		비 고
				당 초	변 경
LVT 방진재	2021080CFE800	철도용 타이패드	24,302조	‘22.06.30.	‘22.08.31.

마. 변경사유 : 노반 인수인계 지연으로 인한 납품기한 변경(※ 지체상금 미부과)

붙임  1. 납품기한 연기 의뢰서 1부.

2. 합의각서 및 물품계약서 각 1부.  끝.

	도시철도토목부장
주무관	조태현		궤도과장	이승우		도시철도토목부장	06/23
代허동
협조자
시행	도시철도토목부-23745	(	2022.06.23	)	접수		(		)
우	04520	서울특별시 중구 청계천로 8, 프리미어플레이스 9층 도시철도토목부 (무교동)	/	https://www.seoul.go.kr
전화	02-772-7242	/전송	02-772-7306	/	cthhsh@seoul.go.kr	/	부분공개(5)