코로나19바이러스감염병 예방 및 확산방지에 적극 동참합시다!
	서 울 특 별 시
수신	광진구청장(치수과장)
(경유)
제목	하수도 정비사업 사업계획 변경요청 검토결과 회신 (광진구)

1. 광진구 치수과-20986(2022.6.22.)호와 관련입니다.

2. "능동로 317 주변 하수관로 정비공사" 관련하여 사업계획 변경(굴착→굴착+비굴착) 요청에

대한 검토결과를 아래와 같이 회신합니다.

가. 사업계획 변경 검토결과

- 변경사유: 이설기간 6개월 소요 및 이설비용 과다발생(약 2억원) 등

- 검토결과: 지장물 구간 비굴착 전체보수 시행

·능동로 317~337간(D450∼700㎜, L=225m): (당초) 굴착개량 → (변경)비굴착

·능동로 324-338간(D600㎜, L=125m): 굴착개량(변경 없음)

나. 기타사항

1) 사업계획 변경(비굴착 전체보수)에 따른 관련절차 이행철저

2) 사업목적 외 예산사용 및 "항"간 예산이용 불가

3) 하수도 공사장 안전사고 예방 및 예산 신속집행 철저.  끝.

	서 울 특 별 시 장
주무관	김성대		하수관리팀장	정한영		물재생계획과장	06/23
박홍봉
협조자
시행	물재생계획과-24612	(	2022.06.23	)	접수		(		)
우	04515	서울특별시 중구 덕수궁길 15, 서소문청사 1동 8층	/	http://www.seoul.go.kr
전화	02-2133-3791	/전송	02-2133-1042	/	sdy0505@seoul.go.kr	/	대시민공개