문서번호	시설관리과-26389
결재일자	2022. 6. 23.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

			시 민
주무관	시설관리팀장	시설관리과장
이규배	이승영	06/23
		조임남
협 조

설계변경(제2회-최종) 검토 보고

(2021년 영등포구 관내 상수도공사)

2022. 6.

남부수도사업소

(시설관리과)

설계변경(제2회-최종) 검토 보고

(2021년 영등포구 관내 상수도공사)

「2021년 영등포구 관내 상수도공사(장기계속단가)」업무수행 중 현장여건 변화에 따른 신규공종 및 계약물량 증·감 발생으로 설계변경을 시행하여 상수도공사 업무에 만전을 기하고자 보고 드림

□ 공사개요

○ 공 사 명: 2021년 영등포구 관내 상수도공사(장기계속단가)

○ 공사개요

- D=15~300㎜, L=1,684m

○ 계약기간: 2021. 6. 25. ~ 2022. 6. 30.

○ 계약금액: *******************************

○ 계 약 자: ************

□ 설계변경 근거

○ 지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령 제74조

- 설계변경으로 인한 계약금액 조정

○ 지방자치단체 입찰 및 계약 집행기준(행정안전부예규 제21호)

- 제13장 공사계약 일반조건 “6(공사설계의 변경)-1(설계변경)-다‘의규정

□ 설계변경 사유

○ 공사시행 중 현장 시공여건 변화 및 소규모 상수도공사의 특수성으로 신규공종 및 물량변동(증·감) 발생

- 신규공종발생: 대형계량기 철거공 100mm 외 등 5개 공종

- 계약물량 증·감 : 아스팔트 포장절단(200㎜이하, 지세) 외 633개 공종

□ 설계변경 현황

○ 공사개요

- 당  초: D=15~300㎜, L=1,684m

- 변  경: D=15~300㎜, L=1,633m

○ 설계변경 금액                                          (단위: 원)

구 분	금 액		증·감	비 고
	당 초	변 경
공급가액	***********	***********	**********	증액
부가가치세	**********	**********	*********	증액
도 급 비	***********	***********	**********	증액

□ 조치계획

○ 도급비가 계약금액보다 증액(******************)되어 본부 안전조사과에 설계변경 계약금액 조정심사를 의뢰코자하며,

○ 조정심사 결과에 따라 설계변경 및 정산시행하고자 함.

붙임  1. 설계변경내역서 1부.

2. 검증확인서 1부.  끝.