투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시중랑물재생센터
수신	관리과장
(경유)
제목	설계변경 의뢰(3처리장 탈취기 지상용 안전측정구 이전설치 공사)

1. 운영과-21729호(2022.05.25.)와 관련입니다.

2. 우리센터 『3처리장 탈취기 지상용 안전측정구 이전설치 공사』에 대하여 설계변경 의뢰하오니 처리하여 주시기 바랍니다.

가. 건    명: 3처리장 탈취기 지상용 안전측정구 이전설치 공사

나. 계약금액: ****************************

다. 계약업체: ************

라. 계약기간: 2022. 05. 31. ~ 2022. 06. 29.

마. 설계변경 내용

계 약 명	변경 전	변경 후	증감내용
3처리장 탈취기 지상용 안전측정구 이전설치 공사	24,400,750원	26,433,000원	증 2,032,250원

바. 예산과목

- 중랑물재생센터 운영관리(사업), 중랑물재생센터 오니처리 유지보수(사업),             오니처리분야 기계설비 유지보수, 수선유지교체비, 수선유지비(탈취시설 보수)

붙임: 1. 공정보고 1부.

2. 설계(변경) 내역서 1부.

3. 합의각서 1부.  끝.

	운 영 과 장
주무관	도형철		주무관	김영부		운영과장	06/23
代이도훈
협조자
시행	운영과-22660	(	2022.06.23	)	접수		(		)
우	04809	서울특별시 성동구 자동차시장3길 64, 중랑물재생센터 본관 3층 운영과	/	http://env.seoul.go.kr/archives/4892
전화	02-2211-2569	/전송	02-2211-2599	/	uall@seoul.go.kr	/	부분공개(6)