“아리수는 오늘도 당신의 삶과 함께 합니다!”
	강동수도사업소
수신	내부결재
(경유)
제목	설계변경(5차-최종) 시행 (2021년 강동수도사업소 관내 포장도로 굴착복구공사)

우리사업소에서 시행중인 아래 공사의 최종 설계변경(5차)에 대하여 본부 안전조사과에 계약금액조정심사를 완료하고 다음과 같이 설계변경 시행하고자 합니다.

가. 공 사 명: 2021년 강동수도사업소 관내 포장도로 굴착복구공사(장기계속단가계약)

나. 계약상대자: 뉴타임건설(주)  대표 박나현

다. 공사기간: 2021.4.19~2022.6.30.

라. 변경사유: 공종별 물량증감, 일반관리비 조정

마. 설계변경 내역

(단위 : 원)

구 분	금 액		증·감	비 고
	당 초	변 경
도 급 비	2,063,291,400	2,238,000,000	증) 174,708,600	증) 8.4%

바. 차수별 부기금액 내역

(단위 : 원)

구 분		금 액		증·감	비 고
		당 초	변 경
도급비	1차수(2021년)	1,331,407,000	1,331,407,000	변경없음
	2차수(2022년)	731,884,400	906,593,000	증) 174,708,600
	계	2,063,291,400	2,238,000,000	증) 174,708,600

사. 예산과목:  자본적지출,유형자산취득,구축물,시설비및부대비

자본적지출,유형자산취득,구축물,시설비및부대비(장기사용송배수관정비)

자본적지출,유형자산취득,구축물,시설비및부대비(장기사용배급수관정비)

상수도사업비용,영업비용,급수공사비,신설공사비

상수도사업비용,영업비용,배급수비,수선유지교체비

소방용수시설보수,시설비및부대비,시설비(소방용수시설 설치 및 보수)

붙임: 1. 설계변경 시행 계획 방침서 1부.

2. 설계변경 관련자료(계약금액조정검토결과서, 설계내역서, 계약금액조정검증확인서)

3. 합의서 1부.  끝.

주무관	황중연		급수관리팀장	양재덕		급수운영과장	代임인택		강동수도사업소장	06/23
김명용
협조자	주무관	권란연
시행	급수운영과-25307	(	2022.06.23	)	접수		(		)
우	05397	서울특별시 강동구 성내로 51 (성내동)	/	http://arisu.seoul.go.kr
전화	02-3146-6143	/전송	02-3146-5189	/	1966hjy@seoul.go.kr	/	부분공개(7)