문서번호	배수과-22475
결재일자	2022. 6. 24.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		배수과장	급수부장
이진영		김근용	06/24
			신용철
협조
	누수대응과장		김형준

『장기사용 대형 송·배수관 정비공사 기본 및 실시설계』

관계자 회의 개최 결과

2022. 6.

상수도사업본부

(배수과)

『장기사용 대형 송·배수관 정비공사 기본 및 실시설계』

관계자 회의 개최 결과

『장기사용 대형 송·배수관 정비공사 기본 및 실시 설계용역』추진사항 공유 및 의견 반영를 위한 관계자 회의를 개최하고 그 결과를 보고 드림

□ 용역개요

○ 용 역 명 : 장기사용 대형 송·배수관 정비공사 기본 및 실시 설계용역

○ 기    간 : '21. 4. 16. ~ '22. 12. 6.

○ 용 역 비 : 1,517백만원

○ 용 역 사 : ㈜유신외 3개사

○ 과업대상 : (19개 구간) ’70~’82년, 강관, D900~2,000㎜, L=37.2㎞

구 분	계	중부	동부	북부	남부	강남	강동
규모(㎞)	37.2(5)	11.4	6.6(2)	2.7	3.6(2)	6.8(1)	6.1
구간(개소)	19(3)	6	4(1)	1	1(1)	3(1)	4

※ ( ) : 우선발주 구간 3건(’79~’82년, D900~D1,650㎜, L=5㎞) 완료 포함

	< 위 치 도 >

□ 추진경과

○ 용역착수	’21. 4. 16.

○ 착수 보고회 개최	’21. 6. 10.

- **************************************** 등

○ 우선발주 구간 설계(공사방안 검토, 공법선정 등)	’21. 6.~11월

○ 현장조사, 개량공법 및 구간별 공사방안 검토	'21. 12.~'22. 5월

○ 중간 보고회 개최	’22. 5. 24.

- *****************************

- *************************

□ 관계자 회의 개요

○ 일    시 : ’22. 6. 10.(금) / 6. 16.(목) / 6. 17.(금)

○ 장    소 : 본부 4층 수계조절실

○ 참 석 자

- (본  부) 배수과 용역 담당자

- (사업소) 송배수관 공사 담당자, 수계조절 요원(중부, 동부, 북부, 강남, 강동)

- (용역사) 사업책임자 및 관계자

일 시	6. 10.(금) 14:00	6. 16.(목) 10:00	6 .16.(목)14:00	6 .17.(금)10:00	6 .16.(금)14:00
사업소	중부	북부	강동	동부	강남

○ 회의내용

- 밸브 조절 및 개량 계획의 포함된 모식도 등 설계 추진사항 공유

· 밸브의 노후도, 현장 여건 등을 반영한 신설/교체/철거 모식도

· 구간별 밸브 조절, 부단수 차단 및 수계전환 세부 계획

· 공사중 배수관로 흐름 변동 최소화를 위한 단계별 공사 계획

- 중간보고회 자료에 대한 사업소 의견사항 협의

○ 주요의견

- 효율적 공사시행을 위하여 연장, 기간 등을 반영한 구간 분리

- 퇴수, 주요 분기 등에 수질, 수압 확인 등이 가능한 다용도밸브 반영

- 누수복구 자료 등 지장물 확인 자료가 부족한 구간에 대해서는 확인굴착 필요

· 확인 필요 구간 : 6개 구간 13개소

구 간 명	중 부 1	중 부 2	중 부 3	중 부 4	중 부 5	강 남 11
개 소 (폭×너비×깊이)	1개소 (2×10×3)	1개소 (1.5×4×3)	4개소 (1.5×4×3)	1개소 (1.5×10×3)	5개소 (2×2×2)	1개소 (1.5×4×3)

※ 확인굴착 예산이 용역에 미반영되어 있으나 지장물 확인 등 설계품질 향상을 위해서 확인굴착이 필요한 실정이므로 ‘장기사용 송배수관 정비’ 예산을 활용하여 실시

- 수계전환 최소화를 위하여 중부 4구간 이후 중부 3구간 정비 실시토록 일정 변경

- 안전을 위하여 ‘북부 9 복개하천 추진구간’ 주유소와 인접 도달구 위치 조정

□ 행정사항

○ 급수부(배수과)

- 공사 기간, 연장, 예산 등 구간별 현황을 고려한 구간 분할 검토

- 배관 상세도 등 향후 설계도면 작성사항 사업소 공유 및 협의

○ 시설부(누수대응과)

- 지장물 확인을 위한 확인굴착 예산 재배정(장기사용 송배수관 정비)

· 소요예산 : 100백만원(개소당 약 8백만원 × 13개소, 중부93백만원, 강남 7백만원)

○ 수도사업소(중부, 동부, 북부, 강남, 강동)

- 지장물 확인을 위한 위한 확인굴착 실시(중부, 강남)

- 향후 설계도면 의견 제출 등 협조

○ 용역사((주)유신외 3개사)

- 관계자 회의 내용을 반영하여 배관상세도 등 설계도서 작성

- 구간 분할 검토 의견 제출

붙임 : 구간별 모식도 1부.  끝.