코로나19바이러스감염병 예방 및 확산방지에 적극 동참합시다!
	서 울 특 별 시
수신	한국교통연구원장
(경유)
제목	과업기간 연장 신청 승인통보(이수~과천 복합터널)

1. 한국교통연구원 민자도로-2334(2022.06.20)호와 관련입니다,

2. 귀 연구원에 위탁하여 추진하고 있는 "이수과천 복합터널 민간투자사업 평가 및 실시협약 협상" 과 관련하여 아래와 같이 과업기간 조정요청을 승인하오니 업무에 참고하시기 바랍니다.

가. 과 업 명 : 이수과천 복합터널 민간투자사업 평가 및 실시협약 협상

나. 과업기간 : 당초 `21.4.30 ~ `22. 6.30 → 변경 ~ `22.10.31.  끝.

	서 울 특 별 시 장
주무관	천주영		민자사업팀장	김상우		도로계획과장	06/24
임창수
협조자
시행	도로계획과-23871	(	2022.06.24	)	접수		(		)
우	04524	서울 중구 세종대로 110, 서울시청 10층 도로계획과	/	http://www.seoul.go.kr
전화	02-2133-8072	/전송	02-2133-0763	/	chjy0130@seoul.go.kr	/	대시민공개