문서번호	건축부-25441
결재일자	2022. 6. 27.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

						시 민
주무관	문화시설과장		건축부장		시설국장		도시기반시설본부장
이석현	박근우		신명승		권완택		06/27
							代권완택
협 조
	재무과장					전성권
	박물관정책팀장					김득삼
	주무관					이상근
	주무관					신경환

서울시 통합수장고 건립공사 발주 시행계획

2022. 6.

도시기반시설본부

(건축부)

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
정책의제 형성	◆ 정책현안에 대해 현황과 실태를 검토하였습니까? - 현황자료(통계자료 등) 및 실태조사서 검토 타지자체 유사정책 및 국내외 사례 분석 등	□	■
	◆ 시민 및 관련전문가 의견을 반영하였습니까? - (시민참여) 청책토론회, 시민공모, 설문조사 등 - (전문가 자문) 자문위원회, TF운영, 타당성 검토조사, 젠더자문관 등	■	□
정책수립	◆ 정책화를 위한 제반 법규(근거법령 및 규칙, 지침 등)는 검토하였습니까? - (선거법) 공직선거법 등 각종 법률 저촉여부 - (성별분리통계) 성별분리통계 생산•제시•분석 등	□	■
	◆ 정책(사업) 집행의 직·간접적 영향 및 효과성을 분석 하였습니까? - (갈등) 이해관계 당사자 간 갈등 및 대책 마련 - (사회적 약자) 사회적 약자에 대한 배려 등 - (일자리) 일자리 창출, 직·간접 채용, 전문인력 양성, 창업지원 - (안전) 시민 안전 위험요인 및 대책, 안전 관리 등 - (온실가스 감축) 건물 및 수송 분야 에너지사용 절감방법, 폐기물 발생 억제 대책 등	□	■
정책집행	◆ 타기관, 민간단체 등과의 협의·협력 및 이견 조정 등을 검토하였습니까? - (타기관) 타기관(중앙정부, 지자체), 민간(단체) 등의 자원 활용 방안 - (자치구 영향) 자치구 행정·인사·재정 부담 및 적정성, 파급효과 분석 등	□	□
	◆ 정책·계획 등의 지속가능성을 검토하였습니까? - (지속가능성) 지역경제 발전, 사회적 형평성, 환경보전 등	■	□
정책홍보	◆ 국내외 정책(사업)홍보방안을 검토하였습니까? - (홍보) 국내보도자료, 기자설명회, 현장설명회 - (정책영문화) 영문제목·요약, 해외언론보도, 외국어 홈페이지 게시 등 - (성평등) 성별고정관념•성차별적 내용 포함 여부 검토	□	■
기타사항	◆ 불필요한 외국어·외래어 표현 대신 바른 우리말을 사용하였습니까?	■	□
	◆ 공개 여부를 "비공개"로 설정했다면 법적근거를 명확히 검토하였습니까? (정보공개법 제9조 제1항 제1호~제8호)	□	■

『서울시 통합수장고 건립공사』

건설사업관리용역 시행계획

우리 본부에서 추진중인「서울시 통합수장고 건립공사」의 입찰 및 낙찰자 결정 방법 등 공사시행 계획에 대하여 검토하고 보고 드림.

※ **********************************

- ********************************************************************

1		공사개요

❍ 공 사 명 : 서울시 통합수장고 건립공사

❍ 위    치 : 강원도 횡성군 우천면 두곡리 550번지 일원

❍ 규    모 : ******************* (대지면적 : 44,615㎡)

❍ 공사기간 : 2022. 8. ~ 2022. 9. (25.9개월, 787일) <예정>

❍ 용    도 : 문화 및 집회시설(수장고)

	층별	면적(m2)	주요용도
지 상	*****	********	********* ********************
	*****	********	***************************
	******	******	***************

❍ 총사업비 (*************************)                        (단위: 백만원)

계	건축비	설비비	용역비	토지매입비	시설부대비
52,482	41,105	3,020	5,906	2,356	95

※ 2022년도 ‘서울시 통합수장고 건립’예산서 참고

❍ 위치도 및 입면도

위치도	조감도

2		추진경위

❍ 2016. 8.    : 서울 통합수장고 건립 부지 공모 계획 방침 수립

❍ 2017. 6. ~ 2019.10. : 건립부지 선정을 위한 계획수립 및 매입계약 체결

❍ 2020. 3.18. : 설계공모 당선작 발표

❍ 2020. 8.28. : 설계용역 착수

❍ 2021. 5.24. : 설계VE

❍ 2021. 7.13. : 건설기술심의

❍ 2021. 7.23. : 횡성군 경관심의

❍ 2021.12.16. : 횡성군 건축구조 심의

❍ 2022. 2.22. : 횡성군계획시설 조성사업 실시계획인가고시 (횡성군고시 제2022-34)

❍ 2022. 4.18. : 건설기술심의 소위원회(공사기간 적정성)[공사기간:25.9개월(787일)]

❍ 2022. 6.    : 계약심사(계약심사과), 계약심의위원회(재무과), 일상감사(공공감사담당관) 완료

3		공사 시행계획

❍ 공 사 명 : 서울시 통합수장고 건립공사

❍ 계약방법 : 단독 또는 공동도급, 장기계속계약

❍ 공사기간 : 착공일로부터 25.9개월(787일) ['22. 8.~ '24. 9. 예정]

❍ 공사금액 : ***************************

❍ 공사비 세부 내역

(단위 : 천원)

구 분	공사비			비 고
	총 계	도급비	관급비
건 축	**********	**********	*********	******
토 목	*********	*********	*******	******
조 경	*********	*********	******	*****
총 계	**********	**********	*********	****

※ 기계, 전기, 통신, 소방 공사 별도발주, 폐기물 용역 별도 발주

※ 관급비는 부가세, 조달수수료를 포함

❍ 예산과목 : 문화본부 박물관과, 박물관 및 미술관 활성화, 박물관 및 미술관 건립지원, 서울시 통합수장고 건립, 시설비

(예산편성부서 : 문화본부 박물관과)

❍ 2022년도 예산현황

(단위 : 천원)

구 분	‘22년 예산현황				비 고
	합 계	‘22년 본예산	명시이월	사고이월
공사비	14,388,150	14,388,150		-
감리비	985,950	552,950	433,000	-
시설부대비	36,167	36,167		-
합 계	15,410,267	14,977,267	433,000	-

※ 1차 공사 예정 금액

- 공사기간 :*******************************

- 공사금액 :*****************************************

4		공사 입찰계획

❍ 도급금액 : ****************

❍ 계약방법 : 지역의무공동도급, 장기계속계약

❍ 입찰방법 : 제한경쟁입찰(실적제한) / 긴급입찰

- 본 공사는 서울시밖의 강원도에서 시행됨에 따라 서울과 지역의 상생도모와 서울시의 위상을 높이고 사용 목적에 맞는 건축물 건립을 위해 품질 확보, 안전관리 등 각별한 시공관리가 요구됨. 따라서 문화 및 집회시설 공사의 경험과 규모를 갖춘 업체로 공사 참가자격을 제한하며, 예산조기집행 및 사업일정이 지연되지 않도록 긴급발주 필요

❍ 입찰참가자격

- *****************************************************************************************************************************************************************************************

※ ****************************************

※ ********************************************************************************************************

❍ 공동도급 유의사항

- 공동이행방식의 공동도급이 가능하며, 공동수급체 구성원의 수는 5개사 이내(최소지분 5%이상)이고 대표자는 출자비율 또는 분담내용의 비중이 많은 업체이어야 함

- 지역의무 공동도급 대상공사이므로 입찰공고일 전일부터 입찰일까지(낙찰자는 계약체결일까지) *****************************를 반드시 공동수급업체 구성원으로 하여야 하고 지역업체의 최소지분율은 ***********************이어야 함.

❍ 현장설명 미실시 : 입찰기간 단축을 위하여 설계도서 열람으로 갈음

- 「지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령」제15조 제3항

❍ 입찰에 관한 서류의 열람 및 교부 : 지정정보처리장치 게재로 갈음

- 조달청 국가종합전자조달시스템 홈페이지(www.g2b.go.kr)에 게재된 ‘서울시 통합수장고 건립공사’입찰자료 열람

❍ 낙찰자 결정방법 : 시설공사 적격심사(추정가격 100억 이상 300억 미만 공사)

- 시공경험, 기술능력, 경영상태 등 업체의 공사수행능력과 입찰가격 등을 종합평가하여 적격심사대상자 중 예정가격 이하로서 최저가 입찰자순으로 적격심사하여 종합평점이 92점 이상인 자를 낙찰자로 결정

< 별지1. 추정가격이 300억 원 미만 100억 원 이상인 입찰공사 평가기준 >

시공경험(14) + 기술능력(15) +경영상태(15) + 신인도(±1.2) + 입찰가격(30) + 하도급관리계획 적정성(12) + 자재·인력조달 가격 적정성(14) ≥ 92점

❍ 하자보증기간

- 「지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행규칙」제68조 및「건설산업기본법 시행령」별표4(건설공사의 종류별 하자담보책임기간)에 따름.

❍ 안전보건 확보의무

- 본 입찰에 참가하고자 하는 자는 중대재해 예방을 위한 산업안전보건법 및 중대재해처벌법을 숙지하신 후 입찰에 응하여야 하며, 입찰서를 제출한 자는 안전보건관리 준수 서약서를 제출한 것으로 간주함. 다만 계약 체결 시에는 낙찰업체의 대표자가 서명 또는 날인한 서약서를 제출해야 함.

- 계약상대자는 종사자의 안전·보건상 유해 또는 위험을 방지하고 그 이용자 또는 그 밖의 사람의 생명, 신체의 안전을 위해 해당 사업의 특성 및 규모 등을 고려하여 다음과 같이 중대재해처벌법 제4조 및 제9조의 안전 및 보건 확보 의무사항을 이행하여야 함.

	≪계약업체의 안전 및 보건 확보 의무사항(제4조, 제9조)≫
① 재해예방에 필요한 인력･예산･점검 등 안전보건관리체계의 구축 및 그 이행 ② 재해 발생 시 재발방지 대책의 수립 및 그 이행 ③ 중앙행정기관･지자체가 관계 법령에 따라 개선, 시정 등을 명한 사항 이행 ④ 안전･보건 관계 법령에 따른 의무이행에 필요한 관리상의 조치

❍ 그 밖의 입찰에 필요한 사항

- 계약상대자는 국민건강보험료, 국민연금보험료, 노인장기요양보험료, 퇴직공제부금비, 산업안전보건관리비, 품질관리비. 안전관리비는 입찰금액(계약금액)에 조정 없이 반영

******* **************	******* **************	********* *************	******* **************
********* **************	***** *************	***** **************

- 본 공사는‘고용개선지원비’대상 공사이며, 정산방법은‘고용개선지원비 공사 원가 반영 및 집행 매뉴얼’을 따름.

5		향후 추진계획

❍ 2022. 6. : 공사계약의뢰 및 입찰공고

❍ 2022. 8. : 공사착공 (예정)

❍ 2024. 9. : 공사준공 (예정)

붙임 1. 계약요청서

2. 공사설명서 각1부.

3. 긴급공고 및 제한입찰 사유서 1부.

4. 계약심사 결과(건축, 토목, 조경) 1부.

5. 일상감사 의견서 1부.

6. 예정공정표 1부.

7. 공사추진 단계별 안전관리 역할·책임기술서 1부.  끝.