문서번호	급수운영과-26220
결재일자	2022. 6. 27.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		급수운영과장
서은교		06/27
		이승완
협 조
	급수관리팀장			최용진
	주무관			박상권
	주무관			안윤자
	주무관			이태화

설계변경 심의결과 보고

( 2021년 북부수도 관내 포장도로 굴착복구공사-2회 )

2022.  6.

북부수도사업소

(급수운영과)

설계변경 심의결과 보고

우리사업소에서 시행중인『2021년 북부수도 관내 포장도로 굴착복구공사-2회』 에 대한 정산 시공물량 증 ․ 감으로 인한 설계변경 사유가 발생됨에 따라 아래와 같이 설계변경 심의회를 개최하고 그 결과를 보고 드림.

1. 공사 개요

가. 공 사 명 : 2021년 북부수도 관내 포장도로 굴착복구공사-2회

나. 공사개요

**************************************************************

****************************************************************

다. 공사기간 : 총차 2021. 6. 11 ~ 2022. 6. 30 (변경없음)

라. 도 급 비

(단위: 원)

구 분	당초금액	변경금액	증 감액
총부기금액	*************	*************	*****************
1차수 금액	***********	***********	*
2차수 금액	*************	***********	**************

마. 도 급 자 :************

2. 심의 개최

가. 심의일정 : 2022. 6. 27.(월)  17:00

나. 심의장소 : 북부수도사업소 급수운영과

다. 심의위원장 : 급수운영과장

라. 심의위원 : 시설6급 최용진, 시설6급 박상권, 시설7급 안윤자, 시설7급 이태화

3. 심의 내용

가. 물량변동의 적정성 여부

나. 각종 제반규정 적정 준수여부

다. 제경비 적정산정 및 적용의 적정성 여부 등

4. 심의 결과

가. 설계변경의 타당성 : 타당함

나. 계약변동(증, 감)물량 계약단가 적정성 여부 : 적정함

다. 각종 제반 규정 적정 준수여부 : 적정함

라. 제경비 적정 산정 및 적용 적정성 : 적정함

마. 관련규정의 불명확한 내용에 대한 검토 : 적정함

5. 조치 의견

위와 같이 설계변경 내역을 심의한 결과 설계변경이 타당하고 검토항목이 적정하여 본 심의결과에 의거 설계변경 시행 및 변경계약을 의뢰코자 합니다.

붙임  1. 설계변경 검토 의견서 및 심의 결정서 1부.

2. 설계변경사유서 1부.

3. 설계변경내역서 1부.

4. 검증확인서 1부. 끝.