문서번호	급수운영과-26416
결재일자	2022. 6. 27.
공개여부	부분공개(7)
방침번호

			시 민
주무관	급수운영팀장	급수운영과장	강서수도사업소장
노병권	이연창	성기선	06/27
			신정철

설계변경계획(2차) 및 심의위원회 계획 보고

2022. 6.

강서수도사업소

(급수운영과)

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
정책의제 형성	◆ 정책현안에 대해 현황과 실태를 검토하였습니까? - 현황자료(통계자료 등) 및 실태조사서 검토 타지자체 유사정책 및 국내외 사례 분석 등	□	□
	◆ 시민 및 관련전문가 의견을 반영하였습니까? - (시민참여) 청책토론회, 시민공모, 설문조사 등 - (전문가 자문) 자문위원회, TF운영, 타당성 검토조사, 젠더자문관 등	□	□
정책수립	◆ 정책화를 위한 제반 법규(근거법령 및 규칙, 지침 등)는 검토하였습니까? - (선거법) 공직선거법 등 각종 법률 저촉여부 - (성별분리통계) 성별분리통계 생산•제시•분석 등	□	□
	◆ 정책(사업) 집행의 직·간접적 영향 및 효과성을 분석 하였습니까? - (갈등) 이해관계 당사자 간 갈등 및 대책 마련 - (사회적 약자) 사회적 약자에 대한 배려 등 - (일자리) 일자리 창출, 직·간접 채용, 전문인력 양성, 창업지원 - (안전) 시민 안전 위험요인 및 대책, 안전 관리 등 - (온실가스 감축) 건물 및 수송 분야 에너지사용 절감방법, 폐기물 발생 억제 대책 등	□	□
정책집행	◆ 타기관, 민간단체 등과의 협의·협력 및 이견 조정 등을 검토하였습니까? - (타기관) 타기관(중앙정부, 지자체), 민간(단체) 등의 자원 활용 방안 - (자치구 영향) 자치구 행정·인사·재정 부담 및 적정성, 파급효과 분석 등	□	□
	◆ 정책·계획 등의 지속가능성을 검토하였습니까? - (지속가능성) 지역경제 발전, 사회적 형평성, 환경보전 등	□	□
정책홍보	◆ 국내외 정책(사업)홍보방안을 검토하였습니까? - (홍보) 국내보도자료, 기자설명회, 현장설명회 - (정책영문화) 영문제목·요약, 해외언론보도, 외국어 홈페이지 게시 등 - (성평등) 성별고정관념•성차별적 내용 포함 여부 검토	□	□
기타사항	◆ 불필요한 외국어·외래어 표현 대신 바른 우리말을 사용하였습니까?	□	□
	◆ 공개 여부를 "비공개"로 설정했다면 법적근거를 명확히 검토하였습니까? (정보공개법 제9조 제1항 제1호~제8호)	□	□

설계변경(2차) 및 심의위원회계획 보고

우리사업소에서 시행중인『2021년 구로구 관내 상수도시설물 설치 및 보수공사』와 관련하여 신규공종 및 물량증감에 따른 설계변경(2차)을 시행코자 함.

□ 공사개요

○ 공 사 명 : 2021년 구로구 관내 상수도시설물 설치 및 보수공사

○ 공사개요 :  - 당초 : 노후밸브 교체 및 변실정비 370개소외 배수지 정비 등

- 변경 : 노후밸브 교체 및 변실정비 67개소외 배수지 정비 등

○ 계 약 일 : 2021. 6. 15.

○ 공사기간 : 2021. 6. 18. ~ 2022. 6. 30.

○ 계약금액 : 금513,143,000원(총부기금액)

○ 도 급 자 : (주)제이앤제이테크

□ 설계변경 근거

○ 지방자치단체를 당사자로 하는 법률 시행령 제74조

(설계변경으로 인한 계약금액 조정)

영업조재지가 입찰공고일 전일까지 서울특별시 소재한 업체

○ 지방자치단체 입찰 및 계약집행기준(예규 제21호)

□ 설계변경 사유

○ 신규공종 발생

- 온수가압장 H빔 젝서포트 설치 등 36개 공종

○ 현장상황 및 여건 변화에 따른 물량증감

□ 계약금액 조정

○ 계약금액 변경 내역                                           (단위:원)

구 분	금 액		증·감	비 고
	당 초	변 경
공급가액	466,493,637	281,150,000	감185,343,637
부가가치세	46,649,363	28,115,000	감18,534,363
도급비	513,143,000	309,265,000	감203,878,000

□ 설계변경 심의 위원회 개최 계획

○ 일   시 : 2022. 6. 28. (화) 10:00

○ 장   소 : 강서수도사업소 3층 회의실

○ 심의내용: 물량 증·감, 신규단가 적정성 및 설계변경 타당성 검토

○ 심의위원

- 위원장 : 급수운영과장

- 위  원 : 급수운영팀장 및 시설6급 주무관 3명

- 간  사 : 급수관리팀장

□ 행정사항

○ 사업소 자체 심의 후 신규공종 및 물량 증·감에 따른 설계변경 시행

붙 임 1. 설계변경 내역서 및 신규일위대가 1부.

2. 설계변경 심의 결과서(서식) 1부.  끝.