문서번호	도시철도사업부-23448
결재일자	2022. 6. 27.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

			시 민
주무관		동북선2과장	도시철도사업부장
왕태현		김현기	06/27
			이철
협조
	주무관		김진호

동북선 103환기구 반복민원 현장조사 결과 보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

도시기반시설본부

(도시철도사업부)

동북선 103환기구 반복민원 현장조사 결과 보고

동북선 103환기구 소음·진동 피해로 인한 공사시간 조정 요청 민원에 대해 현장조사를 실시하고 그 결과를 보고 드림.

□ 민원개요

❍ 민 원 인 : *************************

❍ 민원내용 : 공사 소음·진동으로 피해가 있으니 공사시간 조정 요청

- 07시~(평일, 주말) ⇨ 평일 08시~, 주말 10시 이후~

※ 응답소 현장민원 17건 제출(‘22. 4. 1. ~ 6. 20.)

⇨ 답변내용

·민원인과 보상 협의 및 공사시간 조정 등으로 공사가 지연되어 공정만회를       위해 정상작업(07시~) 시행

·생활불편이 최소화될 수 있도록 소음·진동 규제기준 준수

□ 현장조사

❍ 일    시 :´22. 06. 25.(토) 07:00 ~

❍ 장    소 : 동북선 1공구 103환기구

❍ 조 사 자 : **************************

❍ 조사내용 : 공사시간 적정 여부, 소음·진동 규제기준 준수 여부 등

※103환기구 작업사항(6.25) : 굴착 및 버력반출, 5단 가시설 설치

□ 조사결과

❍ 도심지 혼잡지역 및 작업장 협소에 따른 공사효율 저하 등을 감안할 때 적정공기

를 위해서는 07시부터(평일, 주말) 공사시간이 적정하므로 민원인 요청하는 공사

시간 조정은 어려움.

❍ 소음·진동 측정결과 규제기준 내(65db)로 측정되었으나, 민원인 건물은 굴착

작업장과 바로 연접되고 지속적인 소음·진동으로 인한 정신적인 부분으로 불편을

호소할 수 있는 것으로 보이므로 소음·진동 규제기준을 준수하고 지속적으로 민원인을

이해·설득하면서 공사가 진행되도록  철저한 현장관리가 필요함.

굴착 브레카 작업 및 버력 집적 (6.25. 09:03)	소음진동 측정치(3회) : 54.01~62.67db (기준 : 65db)

□ 조치계획

❍ 공사시간 조정이 어려움을 이해·설득시키면서 정상 공사 추진

❍ 민원인과 지속적으로 소통하여 생활불편에 대한 민원최소화 및 공기 지연에 차질이 없도록 사업시행자에게 통보.  끝.