문서번호	급수운영과-25450
결재일자	2022. 6. 27.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

		시 민
주무관	급수운영팀장	급수운영과장
서동민	서규석	06/27
		代서규석

설계변경(3회) 검토 보고

[2021년 대학동 외 10개동 상수도공사(장기계속단가)]

2022.  06. 27.(월)

남부수도사업소

(급수운영과)

설계변경 검토 보고(3회)

[2021년 대학동 외 10개동 상수도공사(장기계속단가)]

「2021년 대학동 외 10개동 상수도공사(장기계속 단가계약)」시행시 현장여건에 따라 신규공종 및 계약물량 증․감이 발생되어 설계변경을 실시하여 공사시행에 만전을 기하고자 함

□ 공사개요

ㅇ 공 사 명 : 2021년 대학동 외 10개동 상수도공사(장기계속단가)

ㅇ 공사개요 : D=13~300mm, L=1,708m

ㅇ 공사기간 : 2021. 5. 3. ~ 2022. 6. 30.

ㅇ 도 급 자 : ***************

ㅇ 도 급 액 : *************

□ 설계변경 근거 및 사유

ㅇ 지방계약법 시행령 제74조(설계 변경으로 인한 계약금액의 조정)

- 제1항 지방자치단체의 장 또는 계약담당자는 공사계약에서 설계 변경으로 인하여 공사량이 증감이 발생하였을 때에는 『지방계약법 제22조 제1항』에 따라 해당 계약금액을 조정한다.

ㅇ 지방자치단체 입찰 및 계약집행기준

- 제13장 공사계약 일반조건 “6(공사설계의변경)-1(설계변경)-다”의 규정

ㅇ 공사 시행중 현장여건 변동에 따른 신규공종 발생 및 물량변동(증 ․ 감)

□ 설계변경 금액 : 증액

****************************************************************************************************************************************************************************************

□ 설계변경 공사개요

구 분	당 초(2회 설계변경)	변 경(3회 설계변경)
공사개요	D=13~300mm, L=1,778m	D=13~300mm, L=1,377m

□ 설계변경 세부내용

ㅇ 주요공종 물량 증가내역

- 터파기(기계100%)불량-굴삭기(타이어) 0.18㎥외 220개 공종

*********************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************

ㅇ 주요공종 물량 감소내역

- C파쇄물운반(인력상차비포함) 외 82개 공종

*********************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************

ㅇ 신규공종 발생내역

- 대형 계량기 설치공 80mm 외 25개 공종

**********************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************

ㅇ 신규자재 발생내역

- 누수방지새들 80/80 외 3개 공종

공 종	규 격	수 량			금 액(원)
		단위	당초	변경
누수방지새들	80/80	조	-	1	증) 12,284
이형관(에폭시분체)	80~600mm	kg	-	130	증) 406,380
부단수할정자관	500/300mm	개	-	1	증) 544,025

□ 계약금액조정 검증결과 : 적정

ㅇ 계약금액검증조정 시스템에 입력하여 확인결과 최초계약에 따른 요율을 상한초과한 항목이 없으며 특이사항없음.

□ 조치계획

ㅇ 위와 같이 주요 설계변경 사유로 인하여 계약금액이 초과되었으며, 계약심사과-227(2009.1.20.) 「09년 소규모 상수도공사 설계심사 추진계획」에 의거 붙임 설계변경 내역서에 대하여 본부 안전조사과에 심사의뢰하고자 함.

ㅇ 심사 결과에 따라 설계변경 계약의뢰 하고자 함.

붙임  1. 설계변경 내역서 1부.

2. 계약금액조정 검증확인서 1부.  끝.