문서번호	급수운영과-25425
결재일자	2022. 6. 27.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		급수운영팀장	급수운영과장
조승수		서규석	06/27
			代서규석
협조

설계변경 심의 검토보고 [제3회]

2021년 청룡동외 9개동 상수도공사

(장기계속공사)

2022년 6월

남부수도사업소

(급수운영과)

설계변경 심의 결과보고(제3회)

(2021년 청룡동외 9개동 상수도공사(장기계속공사))

「2021년 청룡동외 9개동 상수도공사(장기계속공사)」 신규공종 및 물량증·감 발생에 따른 설계변경(3회) 심의를 마치고 그 결과를 보고 드림.

□ 공사개요

가. 전체분

○ 공 사 명 : 2021년 청룡동외 9개동 상수도공사(장기계속공사)

○ 계약기간 : 2021. 4. 30. ~ 2022. 6. 30.

○ 계 약 자 : 만보이엔씨(주) 대표자 김광운

○ 계약금액 : 금813,648,100원

○ 공사개요 : D=13~300㎜, L=1,463m

나. 1차수(준공)

○ 공 사 명 : 2021년 청룡동외 9개동 상수도공사(장기계속공사)-1차수

○ 계약기간 : 2021. 5. 3. ~ 2021. 12. 31.

○ 계 약 자 : 만보이엔씨(주) 대표자 김광운

○ 계약금액 : 금511,775,000원

○ 공사개요 : D=13~300㎜, L=1,026m

다. 2차수

○ 공 사 명 : 2021년 청룡동외 9개동 상수도공사(장기계속공사)-2차수

○ 계약기간 : 2022. 1. 1. ~ 2022. 06. 30.

○ 계 약 자 : 만보이엔씨(주) 대표자 김광운

○ 계약금액 : 금301,873,100원

○ 공사개요 : D=13~300㎜, L=167m

□ 설계변경 심의위원회 개최

○ 일 시 : 2022. 06. 24.(금) 17:00

○ 장 소 : 남부수도사업소 3층 급수운영과 회의실

○ 심의내용 : 신규공종 및 계약물량 증·감사항 심의

○ 참석위원 : 위원장 급수운영과장 외 심의위원 3명(시설관리과)

간사 및 입회자 3명

□ 심의위원회 검토 내용

○ 설계변경 타당성 : 타당

○ 신규공종 및 계약변동물량 계약단가 적정 여부 : 적정

○ 제잡비 적정 산정 및 적용 적정성 여부 : 적정

○ 각종 제반규정 준수여부 : 준수

□ 설계변경 현황 (전체)

○ 계약금액 변경

구 분	금 액		증 ․ 감	비 고
	당 초	변 경
공급가액	739,680,091	738,490,000	-1,190,091
부가가치세	73,968,009	73,849,000	-119,009
도 급 비	813,648,100	812,339,000	-1,309,100

○ 공사개요 변경

구 분	당 초	변 경
공사개요	D=13~300㎜, L=1,463m	D=13~300㎜, L= 1,822m

○ 주요 신규공종 내역

공 종	규 격	수 량			변동금액(원)
		단위	당초	변경
대형계량기실 설치	D=80mm	개소	-	2	2,999,410

○ 주요 물량 증 ․ 감 내역

공 종	규 격	수 량			변동금액(원)
		단위	당초	변경
콘크리트깨기	소형브레이커, 지세	㎥	48	94.1	5,585,198
인력 터파기(협소,지장물)	견질토사 0-1m, 지세	㎥	450	646.4	10,879,381
토사소운반(인력상차비별도)	2.5DT,현장→집하장(3.0km)	㎥	200	340.7	4,801,949
con’c_인력비빔타설(지세)	t=15cm(10㎥이하)	a	4	2.9	-5,611,715
원형밸브실 설치공 (기초재활용플라스틱)	D=80~300mm	개소	48	23	-10,525,086
대형계량기실 설치	D=80mm	개소	-	2	2,999,410

□ 설계변경 현황 (2차수)

○ 계약금액 변경

구 분	금 액		증 ․ 감	비 고
	당 초	변 경
공급가액	274,430,091	273,240,000	-1,190,091
부가가치세	27,443,009	27,324,000	-119,009
도 급 비	301,873,100	300,564,000	-1,309,100

[※ 차수별 공사금액 변경사항]

구 분	금 액		증 ․ 감	비 고
	당 초	변 경
총 부기금액	813,648,100	812,339,000	-1,309,100
1차수	511,775,000	511,775,000	0	준공
2차수	301,873,100	300,564,000	-1,309,100

○ 공사개요 변경

구 분	당 초	변 경
공사개요	D=13~300㎜, L=167m	D=13~300㎜, L= 526m

○ 주요 신규공종 내역

공 종	규 격	수 량			변동금액(원)
		단위	당초	변경
대형계량기실 설치	D=80mm	개소	-	2	2,999,410

○ 주요 물량 증 ․ 감 내역

공 종	규 격	수 량			변동금액(원)
		단위	당초	변경
콘크리트깨기	소형브레이커, 지세	㎥	0.2	46.3	5,585,198
인력 터파기(협소,지장물)	견질토사 0-1m, 지세	㎥	97.4	293.8	10,879,381
토사소운반(인력상차비별도)	2.5DT,현장→집하장(3.0km)	㎥	12.9	153.6	4,801,949
con’c_인력비빔타설(지세)	t=15cm(10㎥이하)	a	1.2	0.1	-5,611,715
원형밸브실 설치공 (기초재활용플라스틱)	D=80~300mm	개소	30	5	-10,525,086
대형계량기실 설치	D=80mm	개소	-	2	2,999,410

□ 조치계획

○ 설계변경(3회) 심의위원회 개최결과, 적정한 것으로 심의되어 행정지원과에 계약의뢰하고자 합니다.

붙임  1. 설계변경내역서 1부.

2. 설계변경 사전심의 요청서 각1부.

3. 검증확인서 1부.  끝.