문서번호	급수운영과-25690
결재일자	2022. 6. 27.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		급수운영팀장	급수운영과장
박상현		김용만	06/27
			김원수
협 조

현장 실정보고에 따른 검토 보고

2022. 6. 23.

서부수도사업소

(급수운영과)

현장 실정보고에 따른 검토 보고

급수운영과장 : 김원수☎3146-3640 급수운영팀장 : 김용만☎3680 담당 : 박상현☎3685

홍제초등학교 주변 외 3개소 장기사용 배급수관 정비공사와 관련하여 서울시설공단으로부터 제출된 현장 실정보고에 대한 검토 보고임

※관련근거: 공사현장 실정보고서 제출【공사감독2처-5771(2022. 6. 24.)】

□ 공사개요

ㅇ 공 사 명: 홍제초등학교 주변 외 3개소 장기사용 배급수관 정비공사

ㅇ 공사기간: 2022. 4. 18. ~ 2022. 12. 23.

ㅇ 도 급 자: *****

ㅇ 도 급 비: ************

□ 검토내용

구 분	실정보고 내용	사업소 검토 결과
시험굴착 개소 증가	․ 2구간 하부에 지하매설물이 많아 손괴예방을 위해 확인굴착 추가 실시	․ 시공중 지하매설물의 손괴예방을 위해 확인굴착을 추가 실시하고 설계변경 시 반영할 것
	․ 시험굴착 시 기계사용에 대한 인력비 조정 (100% → 50%)	․ 시험굴착 시 기계사용에 대한 인력비 조정하고 설계변경 시 반영할 것
폐기물 수량 증가	․ 2구간은 당초 A-2로 설계되었으나 관부설 시 도종이 CA2로 확인되어 폐기물 수량 증가	․ 2구간 포장형식 변경에 따른 폐기물 수량 증·감에 대하여 설계변경 시 반영할 것
분기밸브 형식 변경	․ 재사용으로 설계된 홍은동 403-4 앞 기존밸브(2개소)는 지수 불량 등으로 교체 필요	․ 합동 현장조사 시 지수 불량으로 확인된 밸브는 신규 밸브로 교체하고 설계변경 시 반영할 것

구 분	실정보고 내용	사업소 검토 결과
종점부 공사시간 변경	․ 2구간은 전체 주간공사로 계획되었으나 코로나 거리두기 해제로 상가, 식당 등이 밀집되어있는 종점부 분기는 야간공사 필요	․ 종점부는 상가 밀집지역으로 분기작업 시 단수 및 공사 소음으로 인한 시민불편 최소화를 고려하여 야간공사 시행할 것
원형철개 교체	․ 기존 재사용으로 계획되어있는 철개중 시공 시 사각받침 원형철개로 확인된 철개는 철거 및 교체 필요	․ 사각받침 원형철개로 확인된 철개는 철거 및 교체하고 변경물량은 설계변경 시 반영할 것

□ 조치계획

ㅇ 상기와 같이 현장 서울시설공단에서 보고된 시험굴착개소 증가 외 4건은 검토결과 타당한 것으로 판단되어 실정보고 검토 의견을 반영하여 시공하고 변경되는 물량은 추후 정산 시 반영하고자 함.

붙임  공사현장 실정보고서 1부.  끝.