문서번호	물재생시설과-23367
결재일자	2022. 6. 27.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		물재생기획팀장	물재생시설과장
남문봉		조장환	06/27
			김윤수
협 조
	물재생운영팀장			김태환
	물재생기전팀장			최년수
	물재생혁신팀장			代김영돈

「서남물재생센터  고도처리 및 시설현대화사업」

시설물 인계·인수 계획 보고

2022. 6.

물순환안전국

(물재생시설과)

「서남물재생센터  고도처리 및 시설현대화사업」

시설물 인계·인수 계획 보고

서남물재생센터 고도처리 및 시설현대화 사업이 완료됨에 따라 서울물재생시설공단으로 시설물 인계·인수를 시행하여 시설 운영 및 유지관리에 만전을 기하고자 함.

Ⅰ		사업 개요

*********************************

*****************************************

*******************************

****************************************************

*************************************************************************

*********************************************************************

***********************************

********************************

**********************

*************************

Ⅱ		주요 추진 경위

○ ’08. 4. 15.: 중랑․서남물재생센터 시설현대화 추진계획 수립

○ ’09. 3. 30.: 설계․시공 일괄입찰 공고(조달발주)

○ ’09. 11. 9.: 우선시공분 계약 및 착공

○ ’12. 8. 31.: 고도처리 개량공사 완료

○ ’13. 5. 22.: 시설현대화 공사 착공

○ ’14. 8. 28.: 고도처리 개량공사 인수·인계 시행(방재시설부 → 물재생시설과)

○ ’19. 8. 31.: 시설현대화 공사 완료(수처리시설 공사완료)

○ ’20. 3. 15.: 시설현대화 수처리시설 종합시운전 완료

○ ’21. 4. 12.: 시설현대화 수처리시설 준공

○ ’21. 4. 16.: 물재생체험관 및 상부공원 착공

○ ’22. 2. 4.: 물재생체험관 및 상부공원 준공

○ ’22. 5. 27.: 공사완료 보고(방재시설부 → 물재생시설과)

○ ’22. 6. 15.: 시설현대화 공사 준공도서 검토 회신(서울물재생시설공단 → 물재생시설과)

－ 준공도서 검토 결과 운영 및 시설유지관리에 문제 없음

Ⅲ		주요 인계·인수 사업내용

○ 시설 현대화 사업

－ 개요

· 수처리시설 1,2계열 철거 후 해당 부지에 고도처리 수처리 시설, 슬러지/반류수 처리시설, 탈취, 신재생에너지, 재이용수 관련시설 등 지하화

*******************************************

**************************************************************************

***************************************

*******************************************************************

*******************************************************************************************************************************************

******************************

○ 서울물재생체험관 및 서울물재생공원

－ 개요

· 규모 : 건축면적 3,428㎡(1층 1,917㎡, 2층 1,285㎡, 옥상 203㎡)

조경면적 52,900㎡(인공지반 40,360㎡, 원지반 12,540㎡)

· 주요시설

▶ 체험관 1층 : 로비, 영상실, 홍보전시실

▶ 체험관 2층 : 로비, 전시시설(별난 물놀이터, 별난 물교실 등)

▶ 물재생공원 : 교목(소나무 등 28종 1,896주), 관목(사철나무 등 13종 17,879주)

수경시설(670㎡), 놀이시설(1,840㎥㎡), 체육시설 등

*****************************************************************

***************************************************************************************************

***********************

Ⅳ		인계·인수(서울시-서울물재생시설공단) 시행 계획

○ 추진근거: 「서울특별시 도로 등 주요시설물 관리에 관한 조례」별표1 및 공사완료 알림(도기본 방재시설부-23078호, 2022.5.27.)

○ 인계·인수 시설물: 토목·건축 구조물 및 기계·전기·통신설비, 조경 등(붙임2)

********

****************************************************************************************

********************************************

*******************************

Ⅴ		향후계획

************************************************

*******************

**********************************

붙임  1. 공사완료 알림 공문(도기본) 각 1부.

2. 인계·인수서(안) 1부.  끝.