문서번호	급수운영과-26213
결재일자	2022. 6. 27.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		급수관리팀장	급수운영과장
이태화		최용진	06/27
			이승완
협 조
	주무관			서은교
	주무관			박상권
	주무관			안윤자
	주무관			조은성

『2022년 도봉구 관내 급수공사』

설계변경 심의 결과보고

2022. 6.

북부수도사업소

〔급수운영과〕

설계변경 심의결과 보고

우리사업소에서 시행중에 있는 『***************************』에 대하여 시공물량 증·감 등 설계변경 사유가 발생됨에 따라 설계변경 심의위원회를 개최하고 그 결과를 보고드림.

1		일 반 현 황

□ 용 역 명 : ***************************

□ 공사개요

○ 당초 : D=13~300mm, L=856m

○ 변경 : D=13~300mm, L=697m

□ 공사기간 : 2022. 2. 22. ~ 2022. 6. 30.

□ 계약금액

○ 당초 : *************

○ 변경 : *************

□ 계 약 사 : **************

2		심의회 개최 현황

※ 관련근거 : 서울특별시 계약심사 처리규칙 및

2018년 상수도사업 계약심사 추진계획(재무회계과-915,2018.01.22.)

□ 심의일정 : 2022. 6. 27.(월)

□ 심의장소 : 북부수도사업소 급수운영과

□ 심의위원장 : 급수운영과장

□ 심의위원 : 시설6급 서은교, 시설6급 박상권, 시설7급 안윤자, 시설7급 조은성

3		심 의 내 용

□ 신규공종 및 계약물량 변동의 적정성 여부

□ 제경비 적정산정 및 적용의 적정성 여부 등

4		설계변경 내용

구 분	당초금액	변경금액	증·감액
*****	***********	***********	************
****	***********	***********	************
*****	**********	**********	***********

□ 신규공종 및 계약물량 증·감에 따른 변경

○ 신규공종 발생

- 대형계량기 설치공 외 21개 공종 발생

○ 공사 중 물량 증·감 사항 발생

- 물량증가 : 아스팔트포장절단 외 97개 공종 증가

- 물량감소 : 콘크리트포장절단 외 399개 공종 감소

5		심 의 결 과

□ 설계변경의 타당성 : 타당함

□ 신규공종 단가산출 적정여부 : 적정함

□ 제경비 적정산정 및 적용의 적정성 : 적정함

□ 계약변동(증,감) 물량 계약단가 낙찰률 적용 적정여부 : 적정함

□ 각종 제반규정 준수 여부 : 적정함

□ 관련규정의 불명확한 내용에 대한 검토 : 적정함

6		행 정 사 항

□ 위와 같이 설계변경 심의결과 설계변경이 타당하고 검토항목이 적정하여

□ 본 심의 검토결과에 의거 설계변경 및 변경계약을 의뢰하고자 합니다.

붙임  1. 설계변경 심의위원회 개최 1부.

2. 설계변경 사유서 1부.

3. 설계변경 심의 신청서 1부.

4. 설계변경 내역서 1부.  끝.