문서번호	기전과-22416
결재일자	2022. 6. 27.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		기전과장	성동도로사업소장
박건우		문동하	06/27
			이경우
협조
	주무관		문준호

『21~22년 도로기전시설물 일상유지보수공사(연간단가)(2차분)』

설계변경(정산) 검토 보고

2022. 6.

성동도로사업소

(기전과)

『21~22년 도로기전시설물 일상유지보수공사(연간단가)(2차분)』

설계변경(정산) 검토 보고

『21~22년 도로기전시설물 일상유지보수공사(연간단가)(2차분)』 시행 중 물량변동이 있어 아래와 같이 설계변경을 실시하고 준공 처리하고자 함.

□ 공사개요

○ 공 사 명 : 21~22 도로기전시설물 일상유지보수공사(연간단가)(2차분)

○ 계약금액 : ************ - (금회 2차분)

- 총계약금액 : *************

○ 계약기간 : 2022. 1. 1. ~ 6. 30. - (금회 2차분)

- 총계약기간 : 2021. 1. 1. ~ 2022. 6. 30.

○ 공사내용 : 가로등, 터널 및 지하차도 유지보수공사 1식

○ 계약업체 : *************************

□ 설계변경 개요

○ 설계변경 사유

- 추정물량으로 설계된 작업물량이 공사 추진과정 중 변동되어 물량 변경 적용

(지하차도 소화기함 설치, 한강교량 가로등주 점검, 가로등주 교체 등)

- 공사원가계산서상의 각종 보험료 감액 정산

○ 설계변경 금액

(단위 : 원)

구분(총차)		계약액	준공액	증, 감	비고
도급비	공급가액	***********	***********	*********
	부가가치세	**********	**********	*******
	합계	***********	***********	*********

○ 주요 변경 내역

연번	내용	규격	변경전	변경후	비고
1	소화기함 교체	550*450*200	0	6면	능산지하차도
2	소화기함 설치	550*450*200	0	6면	답십리, 중랑, 마장지하차도
3	소화기표시등 설치	LED	0	6개
4	전력케이블 신설	CV 4㎟×3C	0	189m
5	전선관 배관	STEEL 28C	50m	143m
5	가로등주 점검		0	595본	성수대교, 동호대교, 영동대교, 광진교
6	가로등주 건주	8~9m	0	2본	성수대교
7	가로등주 건주	10~12m	0	2본	동호대교
8	누전회로탐사		0	7개소	성수대교, 금호터널

□ 보고자 의견

○ 변동내역에 의거 설계변경(정산)을 시행하여 준공 처리하고자 함.

붙임  1. 설계변경 내역서 1부.

2. 제비율검증 확인서 1부.

3. 산업안전보건관리비 검토결과서 1부.

4. 합의각서 1부.  끝.