문서번호	치수안전과-1571
결재일자	2022. 9. 13.
공개여부	부분공개(5)
방침번호	행정2부시장 제209호

					시 민
주무관	대심도사업TF팀장	치수안전과장	물순환안전국장		행정2부시장
이석희	장기철	손경철	한유석		09/13
					한제현
협 조	안전총괄과장			이승복
	물재생계획과장			함명수

- 강남역·광화문·도림천 일대 - 빗물배수시설 추진계획

- 강남역·광화문·도림천 일대 -

빗물배수시설 추진계획

2022.  9.

물 순 환 안 전 국

(치수안전과)

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
정책의제 형성	◆ 정책현안에 대해 현황과 실태를 검토하였습니까? - 현황자료(통계자료, 빅데이터 등) 및 실태조사서 검토 타지자체 유사정책 및 국내외 사례 분석 등	■	□
	◆ 시민 및 관련전문가 의견을 반영하였습니까? - (시민참여) 청책토론회, 시민공모, 설문조사 등 - (전문가 자문) 자문위원회, TF운영, 타당성 검토조사, 젠더자문관 등	■	□
정책수립	◆ 정책화를 위한 제반 법규(근거법령 및 규칙, 지침 등)는 검토하였습니까? - (선거법) 공직선거법 등 각종 법률 저촉여부 - (성별분리통계) 성별분리통계 생산•제시•분석 등	■	□
	◆ 정책(사업) 집행의 직·간접적 영향 및 효과성을 분석 하였습니까? - (갈등) 이해관계 당사자 간 갈등 및 대책 마련 - (사회적 약자) 사회적 약자에 대한 배려 등 - (일자리) 일자리 창출, 직·간접 채용, 전문인력 양성, 창업지원 - (안전) 시민 안전 위험요인 및 대책, 안전 관리 등 - (온실가스 감축) 건물 및 수송 분야 에너지사용 절감방법, 폐기물 발생 억제 대책 등	■	□
정책집행	◆ 타기관, 민간단체 등과의 협의·협력 및 이견 조정 등을 검토하였습니까? - (타기관) 타기관(중앙정부, 지자체), 민간(단체) 등의 자원 활용 방안 - (자치구 영향) 자치구 행정·인사·재정 부담 및 적정성, 파급효과 분석 등	■	□
	◆ 정책·계획 등의 지속가능성을 검토하였습니까? - (지속가능성) 지역경제 발전, 사회적 형평성, 환경보전 등	■	□
정책홍보	◆ 국내외 정책(사업)홍보방안을 검토하였습니까? - (홍보) 국내보도자료, 기자설명회, 현장설명회 - (정책영문화) 영문제목·요약, 해외언론보도, 외국어 홈페이지 게시 등 - (성평등) 성별고정관념•성차별적 내용 포함 여부 검토	■	□
기타사항	◆ 불필요한 외국어·외래어 표현 대신 바른 우리말을 사용하였습니까?	■	□
	◆ 공개 여부를 "비공개"로 설정했다면 법적근거를 명확히 검토하였습니까? (정보공개법 제9조 제1항 제1호~제8호)	■	□

- 강남역·광화문·도림천 일대 -

빗물배수시설 추진계획

′22. 8. 8. ~ 11. 기록적 폭우 등 기후변화에 대응하여 집중호우로부터 안전한 서울을 위한 빗물배수시설 추진계획을 보고드림.

1		추진개요

□ 추진배경

ㅇ ’22.8.8.~11. 방재성능을 초과하는 기록적인 폭우로 대규모 침수피해 발생

- 최대 강우량 강남역 일대 116mm/h(150년 빈도), 도림천 일대 142mm/h(500년 빈도)

- 강남역 일대 등 침수취약지역을 중심으로 인명·재산 피해 발생

ㅇ ’22.8.10. ‘집중호우로부터 안전한 서울’ 수방대책 발표

- 방재성능목표를 30년에서 50년 빈도로, 강남 등 주요지역은 100년 빈도로 상향

- 빗물배수시설 건설 등 100년 빈도 강우에도 안전한 수방대책 추진

·1단계 : ① 강남역, ② 광화문, ③ 도림천 일대

·2단계 : ④ 사당동, ⑤ 강동구, ⑥ 용산구 일대

□ 그간 추진현황

**************************************

*****************************************

***********************************

*************************************************

****************************************************

2		추진방향

□ 방재성능목표 최대 100년빈도로 상향

ㅇ 30년빈도(95mm/h)→50년빈도(강남 100년빈도)에도 대응 가능한 시설계획

※ 사업별‘타당성조사 및 기본계획 용역’추진하여 구체적 시설규모 설정

□ 기상이변 대비 ’27년까지 사업완료

ㅇ 계획·설계 단계별 정교한 행정절차 추진 및 시공방법 개선

※ ‘수해 안전 특별대책 TF’ 활용하여 실·국간 협조사항 등 사업기간 리스크관리

3		사업별 추진계획

➊ 강남역 일대 빗물배수시설

ㅇ 사업구간 : 강남구 강남역 ~ 한강

ㅇ 사업내용 : 빗물배수시설 D=8.3m, L=3.1km

ㅇ 총사업비 : 3,500억원(국비·시비)

ㅇ 사업기간 : ’23. ~ ’27.

ㅇ 추진방법 : 「하수도법」 하수저류시설

➋ 광화문 일대 빗물배수시설

ㅇ 사업구간 : 종로구 효자동 ~ 청계천

ㅇ 사업내용 : 빗물배수시설 D=5.5m, L=3.2km

ㅇ 총사업비 : 2,500억원(국비·시비)

ㅇ 사업기간 : ’23. ~ ’27.

ㅇ 추진방법 : 「하수도법」 하수저류시설

➌ 도림천 일대 빗물배수시설

ㅇ 사업구간 : 동작구 신대방역 ~ 여의도

ㅇ 사업내용 : 빗물배수시설 D=4.0~8.5m, L=5.2km

ㅇ 총사업비 : 3,000억원(국비·시비)

ㅇ 사업기간 : ’23. ~ ’27.

ㅇ 추진방법 : 「하천법」 하천공사

4		용역 추진계획

□ 용역개요

**********************

****************************************

****************************

**************************************************************

*******************

*************************

*************************

*************************

□ 용역 수행방안

****************

****************

**********

*****************************************

**************************

***************************

5		향후계획

*********************************************

*******************************

*****************************************

*****************************************

***************************************

*******************************