노해로 119 주변 하수관로 정비공사 실정보고

『노해로 119 주변 하수관로 정비공사』추진중 현안사항이 발생하여 아래와 같이 보고합니다.

1. 사업현황

○ 공 사 명: 노해로 119 주변 하수관로 정비공사

○ 총사업비: 148,959천원(시비)

- 공사비: 138,371천원(도급비 73,551천원, 관급비 13,323천원, 이전비 51,497천원)

○ 공사기간: 2016. 05. 27.∼2016. 08. 24.

○ 공사개요

- 하수관로 신설 D=900mm, L=50m

○ 도 급 자: 주현산업개발㈜  대표 김영숙

2. 보고내용 및 검토의견

○ 시공 물량변경 건

- 사유지(노해로 119)내로 지나가는 하수관로(D=900mm)를 도로부지로 이설하는 공사를 시행하고 있으나, 건물주로부터 가건물 밑에 있는 기존 하수관로 제거 요청이 있는 바, 기존 하수관로 제거를 위해서는 담장 철거 및 바닥콘트리트 깨기 등의 폐기물 물량(11㎥) 증가와 담장 원상복구가 필요한 실정이며

-  하수관로 부설구간의 도로를 굴착 확인한 바 콘크리트 20cm와 아스팔트 5cm로 포장되어 있어 콘크리트 폐기물 물량(78㎥)이 증가됨

-  토사 붕괴 방지를 위하여 조립식간이흙막이 설치후 하수관로를 부설토록 계획하였으나 지장물(통신관로)로 인하여 조립식간이흙막이 설치가 불가함

- 소요예산 : 감)2,000천원

○ 추가 공사구간 건

- 노해로33길 6 ~ 노해로 123-4 골목 주민들로부터 하수관로 공사 요청이 있어 조사한 바, 부설년도를 알 수 없을 정도로 노후된 하수관로로  흄관내부 부식, 균열, 연결부 불량 및 구배불량 등 도로함몰 및 집중호우시 침수피해 우려가 있음

- 사업개요

· 하수관로 개량 D=450mm, L=85m

· 소요예산 : 60,000천원

○ 검토의견

- 원활한 공사진행과 민원해소를 위해 담장 철거 후 사유지내 기존  하수관로를 제거하고 담장을 원상복구하고, 폐기물 물량증가 및 조립식간이흙막이 설치 작업 제외는 추후 설계변경시 반영코자 하며,

- 추가 공사 요청건에 대하여는 도로함몰 및 수해예방을 위하여 본 공사의 낙찰차액 및 이전비를 사용하여 본 공사에 포함 시공함이 타당하다고 판단됨.

3. 조치계획

○ 위 검토의견과 같이 추가되는 물량에 대하여 시공사로 하여금 우선 시공 하도록 작업지시하고

○ 소요 공사비(58,000천원)는 본 공사의 낙찰차액(10,587천원) 및 이전비(51,497천원)을 사용하여 향후 설계 변경시 반영 조치 하고자 함.

결재	★주무관	하수관리팀장	안전치수과장	건설안전교통국장
	장성호	장현준	함명수	전결 08/10 김희동
협조