공 사 설 명 서

1. 공 사 명: 수송초등학교 주변 하수암거 보수공사

2. 공사목적

○ 수송초등학교 주변 하수관거는 설치된 지 약 40년이 경과된 시설물로 노후 및 파손정도가 매우 심해 토사유실로 인한 “도로함몰” 등 안전사고가 빈번히 발생하는 지역으로 금번 정비를 통하여 차량통행 안전사고 예방에 만전을 기하고자 함.

3. 총공사비: 금144,358천원(도급비 140,382천원, 이전비 3,976천원)

4. 공사개요

○  사업기간: 2017. 10. ∼ 2017. 12.(90일)

○ 위    치: 수송초등학교 주변

○ 규    모

공종	규 격	단위	수 량	비 고
단면보수공	단면보수(천정)	㎡	100
	단면보수(벽체)	㎡	166
	단면보수(바닥)	㎡	150
	부 대 공	식	1

6. 설계변경 조건

- 본 공사는 조사 당시 수집된 자료에 의거 설계된 것인 바, 착공후 변경사항이 발생되었을 때에는 현장의 현황에 맞추어 변경할 수 있다.

1) 물량 변경이 있을 때

2) 공법 변경이 불가피할 때

3) 발주처의 형편상 설계변경을 필요로 할 때

4) 단가 변경이 있을 때

- 지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 제22조 및 동법 시행령 제73조, 제74조, 제75조에 의거

5) 기타 감독관이 필요하다고 인정할 때

- 설계변경 사유 발생시는 발주기관과 계약상대자가 상호 협의하여 결정한다.

7. 공사기간 변경사항

- 본 공사 착공일은 계약일로부터 3일 이내로 하고 공사기간은 착공일로부터 90일 까지이며 다음과 같은 경우에는 기간을 변경(연장)할 수 있다.

1) 공사시행 중 천재지변 또는 한파 등으로 인하여 작업이 불가능하였을 경우

2) 시행청의 지시에 의거 작업을 중단하였을 경우

3) 지장물 철거․이설 등으로 인하여 시공이 곤란한 경우

4) 민원발생 등으로 인하여 시공이 곤란한 경우

5) 기타 특수한 사정으로 인하여 공사기간 연장이 필요한 경우

8. 기타사항

- 하수관거 정비공사 품질관리자(품질관리자가 없는 경우 현장 참여기술자중 1인) 및 기능공(하수관거 부설 배관공) 전원은 한국상하수도협회에서 시행하는 하수관거 정비공사 시공 전문기술  교육과정을 이수하여야 하며, 착공시 이수증 사본을 제출하고 공사 시행시 이수증을 소지하여야 한다.

- 단, 교육기관 일정 등으로 착공전 교육이수가 불가능한 경우 교육이수 계획서를 제출하고   공사를 시행하여야 하며, 착공 후 1개월 이내에 교육을 이수하여야 한다.

9. 예정공정표

공 종	수량	10월			11월			12월			비고
단면보수공	1식
부 대 공	1식

공사계약 특수조건

1. 본 특수조건은 『수송초등학교 주변 하수암거 보수공사』에 적용한다.

2. 설계도서상 각 공종별 물량은 계약물량의 범위 내에서 실작업 물량에 대하여 정산 시행한다.

3. 도로 등 굴착을 필요로 하는 공사의 경우에는 계약자가 가스, 전기, 상․하수도 등 지하매설물 관련 도면등을 관계기관에서 확인하여 안전수칙에 따라 시행하여야 한다.

4. 지하매설물 등을 관리하는 관계부서에서의 관계자를 사전에 입회시켜 지하매설물의 위치, 보존상태에 대한 이상 유․무를 확인한 후 발주처에 보고, 승인을 받아 시공하여야 한다.

5. 공사시행과정 및 상기 사항 불이행으로 인하여 발생되는 민․형사상의 손해에 대한 책임은 계약자가 전적으로 부담한다.

6. 본 공사로 인하여 발생한 폐기물은 『2017년 하천시설물 건설폐기물 처리계획』 방침에 의거 처리토록 한다.

7. 본 공사는 특허 제10********호(내산보수모르타르 및 내산표면보호제 조성물과 이를 이용한 콘크리트 단면복구 및 표면보수공법)이 적용되었으며 낙찰자는 해당 공법에 대한 특허 개발사와 특허 사용협약을 체결하고 협약서 원본을 계약전 계약서류와 함께 제출하여야 한다.