구민이 주인되는 희망강북!
		강북구
수신자	내부결재
(경유)
제 목	설계변경(1회-정산) 시행 - 수유벽산아파트 주변 하수관로 정비공사(굴착)

우리구에서 시행하고 있는 『수유벽산아파트 주변 하수관로 정비공사(굴착)』에 대하여 아래와 같이 설계변경(1회-정산)을 시행하고자 합니다.

1. 공 사 명: 수유벽산아파트 주변 하수관로 정비공사(굴착)

2. 착 공 일: 2017. 07. 05.

3. 준공기한: 2017. 12. 06.

4. 도 급 자: 주식회사 광훈산업건설  대표 송선면

5. 설계변경 내역                                                (단위:  원)

구 분	당 초	변 경	증 · 감	비 고
총공사비	502,317,200	549,899,100	증 47,581,900
도 급 비	312,435,200	383,911,000	증 71,475,800
관 급 비	90,140,600	107,946,550	증 17,805,950
이 전 비	99,741,400	58,041,550	감 41,699,850

6. 예산과목

가. 안전치수과, 하수기반시설의확충및정비, 하수관거정비및준설사업지속추진, 수유벽산아파트 주변 하수관로 정비공사, 시설비및부대비, 시설비

※ 일상감사 완료[감사담당관-15105(2017. 11. 29.)호]

※ 계약심사 완료[감사담당관-15096(2017. 11. 29.)호]

붙임  1. 설계변경 사유서 1부.

2. 변경설계서(정산) 1부.

3. 제비율검증 1부.

4. 방침서 3부.

5. 일상감사 및 계약심사 결과 각 1부.  끝.

주무관	전기훈		하수관리팀장	代조광희		안전치수과장	함명수		건설안전교통국장	전결 12/04 김희동
협조자	계약팀장	남정우		재무과장	김영모
시행	안전치수과-21759	(		)	접수		(		)
우	01133	서울특별시 강북구 솔매로49길 14(미아동)	/	http://www.gangbuk.go.kr
전화	02-901-5883	/전송	02-901-5880	/	junshgh@gangbuk.go.kr	/	부분공개